문서번호	설비부-1747
결재일자	2019.2.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
김진수		김은덕	02/11 代여인웅
협조

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 검토 보고

2019. 02.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(제1회) 검토 보고

『돈화문 민요박물관 건립 전기공사』의 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정(제1회)에 대한 검토결과 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 전기공사

□  위    치 : 서울특별시 종로구 와룡동5-9의 2필지

□  규    모 : 지하 2층 / 지상 1층(연면적 1,384.82㎡)

□  공사기간 : 2018.01.10. ~ 2019.07.09.

□  도 급 비 : 442,214,000원(1차 209,000,000원)

□  감 리 사 : ㈜혜원까치종합건축사

□  시 공 사 : 이본건설(주)

2		관련근거

□ 혜원 제2019-028호(`19.01.31)물가변동(총차 및 1차1회)으로 인한 계약금액 조정 승인요청

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 동법 시행령 제73조, 동법 시행규칙 제72조

□ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

3		검토내용

□ 물가변동(ESC) 조정 조건

구분	기준시점		비교시점 (조정기준일)	지수조정률	경과기간
	입찰일	계약일
1회	`18.01.03	`18.01.04	`18.09.01	4.61%	239일

※ 공사계약일반조건 제7절(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 의거, 계약일로부터 경과기간90일 이상, 입찰일 기준으로 물가변동율 3%이상

□ 검토내용

○ 물가변동에 따른 지방자치를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 공사계약 일반조건과 특수조건 및 회계예규에 의거 적법하게 산출되었는지 검토

○ 물가변동 조정요건의 적정성여부 검토

○ 물가변동 비목분류 및 계수 산출의 적정성 검토

○ 물가변동 시점을 기준으로 한 적용대가 산출의 적정성 검토

□ 물가변동 조정금액(1회)

(단위 : 원)

구 분	금 액	검토내용	비 고
대상 공사 계약 금액(A)	415,175,195	조정기준일 당시 계약금액
적용 제외 금액(B)	6,892,000	예정공정율:1.66% 실행공정율:1.63%	`18.09.01 공정률
적용 대상 금액(C)	408,283,195	(A – B)
물가변동 조정율(D)	4.61%
물가변동 조정금액(E)	18,821,000	(C × D)
선급금공제(F)	-	-
물가변동조정 적용금액	18,821,000	(E – F)

□ 계약금액 조정내역

(단위 : 원)

구 분	변경전	변경후	증감(ESC분)	비 고
총 차	442,214,000	461,035,000	증)18,821,000
1 차	209,000,000	216,841,000	증)7,841,000

※계약금액은 건축평면 변경계획에 따른 설계변경 기준(변경계약일`18.11.28)

4		건설사업관리단 검토의견

□  상기와 같이 「돈화문 민요박물관 건립 전기공사」와 관련하여 검토한 결과 입찰일로부터 물가변동 경과기간 239일이며, 지수조정률 4.61%로써 물가변동 조정요건이 적정하므로 계약금액 조정이 타당하다고 사료됨.

5		조치의견

□  건설사업관리단이 검토한 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회)이 적정한 것으로 판단되므로, 계약금액 조정 보고를 승인하고, 물가변동(ESC)에 의한 계약금액 조정을 요청하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.