문서번호	소방행정과-1769
결재일자	2019.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		★소방서장
강창희	전다영	최규태		02/19 정재후
협 조	119안전센터장		송장권
	119안전센터장		이근희

- 은평소방서 -

2019년도 청사 보수보강 사업 기본계획

2019. 2.

은 평 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년도 청사 보수보강 사업 기본계획

2019년도 소방청사 보수보강공사 사업예산의 조기집행으로 지역경제를 활성화 시키고 및 청사 개보수를 통한 근무환경 개선으로 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

Ⅰ

관 련 근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제24조 『시설물의 보수․보강등』

□ 市 소방행정과-1706(2019.1.22.)호 『 2019회계연도 세출예산 운영 계획 알림』

□ 市 소방행정과-2039(2019.1.23.)호 『 2019년 소방관서 시설물 유지 보수 예산배정 내역 알림(알림) 』

Ⅱ

추 진 목 적

□ 지방재정의 조기집행을 통한 지역경제의 활성화 촉진

□ 노후 청사시설물 보수․보강을 통한 쾌적한 근무환경 조성

□ 청사 환경개선을 통한 소속 직원들의 사기 진작에 기여

□ 효율적이고 투명한 예산 집행

Ⅲ

사 업 개 요

□ 사업기간 : 2019. 2월 ～ 2019. 11월

□ 사업예산 : 금265,198천원(금이억육천오백일십구만팔천원)

○ 본서 및 시민안전체험관 소변기 교체 공사 : 금20,000천원

○ 본서 주계단 바닥재 교체 공사 : 금15,000천원

○ 본서 소방훈련탑 도색 공사 : 금10,000천원

○ 녹번 옥상 방수 공사 : 금23,000천원

○ 역촌 내진성능 보강공사 : 금143,569천원

○ 녹번 내진성능 보강공사 : 금53,629천원

Ⅳ

세부 추진 계획

1

본서 소변기, 주계단 바닥재 교체 및 소방훈련탑 도색 공사

□ 사업대상

○ 본서 및 시민안전체험관 소변기 교체 공사

○ 본서 주계단 바닥재 교체 공사

○ 본서 소방훈련탑 도색 공사

□ 사업기간 : 2019. 3월 ～ 2019. 6월(4개월간)

□ 사업예산 : 금45,000천원(금사천오백만원) - 시설비

□ 계약방법 : 장애인기업 1인견적 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제6장 수의계약운영요령)에 의거 계약진행

○ 일상감사 구분 :　비대상

- 서울시 일상감사 규정 제4조(일상감사 대상) 및 별표 1

- 공사는 추정가격 2천 이상인 1인견적 수의계약일 경우 해당(단, 추정가격 5천만원 이하 장애인기업과의 수의계약 제외)

○ 계약심사 구분 :　비대상

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제3장(계약심사운용요령)

- 전문공사는 추정가격 3억원 이상일 경우 적용

○ 제한여부

- 지역제한 : 수도권 제한(A/S관련)

- 자격제한 : 전문건설공사(시설물유지관리) 면허 보유

□ 계약업체 : 시장조사 후 적격 업체 선정

□ 감독 및 검사 : 서울시 재무회계규칙 제111조(검사자의 지정) 및 별표 5

○ 현장감독 공무원 : 장비회계팀장

○ (준공)검사자 : 현장대응단 진압대장

2

녹번119안전센터 옥상 방수 공사

□ 사업예산 : 금23,000천원(금이천삼백만원) - 시설비

○ 市 자산관리과-10249(2018.9.5.)호 『 시유재산 안전을 위한 예산 지원 및 재배정 알림』 에 의거 기실시

	《녹번119안전센터 청사 방수공사 현황》
○ 공사기간 : 2018. 10. 15. ~ 11. 2. ○ 공사내역 - 옥상 기존 마감재 철거 후 콘크리트 타설 및 우레탄 작업 - 옥상 간이창고 천정 및 외벽창소 코킹 교체 - 청사 후면 선홈통 관로 확장 및 1개 추가 설치 ○ 소요예산 : 금23,500,000원 (자산관리과/국·공유재산의 체계적관리/국·공유재산의 효율적인 매각관리/체비지 유상기관 및 시설관리/시설비)

□ 예산집행 : 청사 환경개선 및 긴급 보수보강 등 새로운 사업 발굴·추진

※ 추진계획 별도 수립

3

녹번·역촌119안전센터 내진성능 보강공사

□ 사업예산 : 금197,198천원(금일억구천칠백일십구만팔천원) - 시설비

○ 역촌119안전센터 증축 사업과 통합하여 추진 중(소방행정과-1254호, 2019.2.7.)

Ⅴ

사업추진 일정

□ 기본계획 및 발주계획 수립 (3월말)

□ 공사발주 및 계약 (4월 중순)

□ 공사시행 (4월 ∼ 6월)

□ 준공검사 및 대금지급 (6월)

□ 업무추진 로드맵

순 서	추 진 내 용	2 0 1 9 년
		4월				5월				6월
1	기본계획 수립
2	공사발주
3	계약
4	공사시행
5	준공검사 및 대금지급

끝.