문서번호	도로보수과-3338
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
김종범		06/05 손수희
협 조

설계변경(1회) 검토보고

관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(1회) 검토

관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

우리 사업소에서 시행중인 『관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 서울시시설관리공단으로부터 설계변경(1회) 보고가 있어 이에 대한 검토 보고임

1		공사 개요

공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28.

공사개요 : 불량맨홀정비(주간) 131개

불량맨홀정비(야간) 425개

도 급 비 : 522,113,800원

도 급 자 : 태평림건설(주) 대표 이동균

2		변경사유 및 변경내용

설계변경 사유

o 맨홀 관리기관 공종별 시공 물량 증, 감

주요 변경내용

o 불량맨홀 정비(주간) : 당초 131개소, 변경 266개소

o 불량맨홀 정비(야간) : 당초 425개소, 변경 316개소

공사비 변경

o 변경사항 없음

3		조치 계획

상기 설계변경 내용이 적정하므로 변경계약 시행코자 합니다.

따로붙임 : 서울시시설관리공단 공문 1부.  끝.