문서번호	건축부-2511
결재일자	2019.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
오명희		조영수	02/19 임인구
협조

『창작연극지원센터 건립공사 설계용역』

계약변경(기간연장) 검토보고

2019. 2.

도시기반시설본부

건축부

『창작연극지원센터 건립공사 설계용역』

계약변경(기간연장) 검토보고

「창작연극지원센터 건립 공사」설계용역과 관련하여 설계자로부터 용역기간 연장 요청이 있어 검토 보고 드림.

Ⅰ		용역현황

□ 용 역 명 : 창작연극지원센터 건립공사 설계용역

□ 위    치 : 성북구 동소문동 1가 1-4외 1필지(한성대입구역 인근)

□ 규    모 : 지하2층/지상6층, 연면적 7,201㎡

□ 주 용 도 : 문화 및 집회시설(공연장)

□ 용 역 사 : 운생동건축사사무소㈜외 1

□ 용역금액 : 1,144백만원

□ 용역기간 : 2018.1.29.~2019.2.22.

Ⅱ		추진경위

□ 2018.1.29. : 설계용역 계약 및 착수

□ 2018.4.24.~6.5. : 전문가 TF회의 3회 개최

□ 2018.6.20. : 사업 건립계획 변경(기본설계 재검토)

□ 2018.8.8.~10.16 : 성북구 건축심의, 서울시 경관심의(조건부 통과)

□ 2018.10.18. : 설계자문회의

□ 2019. 2.     : 건설기술심의, 공용건축물 협의완료

□ 2019. 2.     : 설계용역 기간연장 요청(운생동건축사사무소 → 건축부)

Ⅲ		계약변경 검토

□ 관련근거

- 지방자치단체 용역계약 일반조건 제8절 2. 계약기간의 연장

- 설계기간 연장 요청 건(운생동건축사사무소 2019-3호, 2019.2.18.)

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
용역기간	******************	*******************	***

***************************************************

**************************

******************************

************************************************

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		처리의견

***************************************************************************

********************************************************************

Ⅴ		향후계획

□ 2019.   3.  : 계약심사, 계약심의위원회 및 일상감사

□ 2019.4.10. : 설계용역 준공

□ 2019.4.~5. : 건설사업관리 용역 발주 및 착수

□ 2019.5.~7. : 공사발주 및 착공

붙 임 : 설계용역 기간연장 요청 및 예정공정표 1부.  끝.