				★ ◎
문서번호	성북센터-1978			팀 원			팀원				부원			성북센터장				북부주거복지단장
보존기간	10년																			02/26
				김동희			최보식				송상호			박우석				김선직
결재일자	2019.02.26
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
설계변경심사위원회 개최 계획(안)
		서울주택도시공사
( 북부주거복지단 성북센터 )

제 2019 - 01회 설계변경 심사위원회 개최 계획(안)

성북권역 임대주택 시설물 유지보수공사와 관련하여 입주예정세대 등 시설물 보수물량 증가로 준공기한까지 지급할 보수공사금액이 부족하여 설계변경을 하고자 아래와 같이 설계변경 심사위원회를 개최코자 함.

1. 설계변경 대상공사

공사명	시공사	계약금액(원)	공사기간	비고
성북권역 임대주택 시설물 유지보수공사	(주)대륜씨에스	1,473,021,000	2017.04.01. ~2019.03.31

2. 관련 근거

가. 설계변경 심사위원회 운영기준 (2019.01.08.)

나. 성북센터-1930(2019.02.25.)호:『시설물 유지보수공사 설계변경(2차) 검토 보고』

3. 심사위원회 개최

가. 안    건 : 성북권역 임대주택 시설물 유지보수공사 설계변경 타당성 심사

나. 제안부서 : 북부주거복지단 성북센터

다. 심사일시 : 2019년 02월 27일

라. 방    법 : 서면 결의

마. 심사위원

위 원 장	북부주거복지단	단 장	김 선 직
부위원장	성북센터	센 터 장	박 우 석
위 원	기획조정실	재정관리부장	이 태 종
	기획조정실	예산자금부장	민 동 조
	경영지원처	계약심사부장	한 일 현
	시설관리처	시설계획부장	손 오 성
	성북센터	시설팀장	송 상 호

바. 심의의결 대상

1) 설계변경 타당성 심사

□ 입주예정세대 및 전용부, 공용부 물량증가 및 긴급 보수공사로 인한 설계변경

□ 향후 시설물 보수를 위한 예산 확보

2) 단가적용기준에 대한 심사

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으          로 인한 계약금액의 조정)의 규정에 따른 계약낙찰률 적용

4. 공사비 증감 내역(총괄)                                 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직접공사비	1,022,754,741	1,254,734,796	231,980,055
제경비	450,266,259	565,606,204	115,339,945
도급공사비	1,473,021,000	1,820,341,000	347,320,000

5. 행정사항

- 상기 안건 심의결과 후 계약변경 업무시행.

붙임  1. 부의안 및 부의안 설명서

2. 의결안

3. 시설물 유지보수공사 설계변경(2차) 검토 보고

4. 설계변경(2차)내역서.  끝.