문서번호	토목부-3854
결재일자	2019.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
백종임		명경출	03/08 김영수
협조
	주무관		서민석

남부순환로 포장두께 검토보고

[구로고가 철거공사]

2019. 03.

도시기반시설본부

(토 목 부)

남부순환로 포장두께 변경 검토보고

[구로고가 철거공사]

「구로고가 철거공사」의 도로포장 계획을 남부순환로 타현장과 비교하고, 교통량 등을 고려하여 적정 포장두께로 변경하고자 검토보고 드림.

1		관련근거

❍ 광안건(구) 제2019-15(`19.01.24.) : 실정보고(남부순환로 포장두께 변경)

2		공사개요

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

❍ 규    모 : 고가차도 철거(폭 18.5m, 연장 536m)

❍ 공사기간 : '18.8. ~ '19.6.

❍ 도 급 비 : 6,756백만원

❍ 시 공 사 : 새천년종합건설 주식회사 외 2개사

❍ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 2개사

❍ 공 정 률 : 53.5%

3		건설사업관리단 보고내용

□ 남부순환로 포장두께 변경

❍ 추진경위

- ‘19.01.22 : 포장두께 관련 원설계자 의견 요청 (감리단→원설계자)

※ 당초 : 포장두께(총두께 80cm, 아스콘두께 40cm)

검토 : 인근 남부순환로(광복교~안양교 도로확장,개봉1동 평탄화 공사) 포장두께

(총두께 42∼60cm, 아스콘두께 27∼30cm)

변경 : 재산정 포장두께(총두께 80cm, 아스콘두께 30cm)

- ‘19.01.23 : 포장두께 관련 원설계자 의견(원설계자→감리단)

※ 남부순환로 교통량을 근거로 한 두께 재산정은 적정함

- ‘19.01.24 : 현안사항 검토 보고(포장두께 변경)(감리단→발주처)

❍ 포장두께 검토(교통량 반영 두께 산정)

-「한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계용역」에서 교통량   을 한남대로 교통량으로 산정되어 재산정 필요

구 분	당 초		변 경
1차 포장 (가포장 : 포장 두께 80cm)
		20cm		13cm
		20cm		17cm
		40cm		50cm
2차 포장 (최종포장 : 평삭후 표층 덧씌우기5cm)		5cm		5cm
		15cm		8cm
		20cm		17cm
		40cm		50cm
적용교통량	한남대로(227,417대/일)		남부순환로(104,286대/일)

❍ 설계도면과 내역서 수량 불일치 조정

구 분	당 초(내역반영)		변 경(설계반영)
도 면	보조기층 : 40cm		보조기층 : 50cm
내 역	보조기층 : 20cm 수량 : 2,808m3		보조기층 : 50cm 수량 : 7,019m3
도급비	94백만원		223백만원 (증129백만원)
관급비	982백만원		768백만원 (감214백만원)
공사비 (증·감)			감85백만원

□ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
3. 포장공		식
3.01 보조기층 포설 및 다짐
a. 보조기층 포설 및 다짐	T=10cm, 소규모(인력)	m3	49	49	-
b. 보조기층 포설 및 다짐	T=20cm	m3	2,808	-	-2,808
c. 보조기층 포설 및 다짐	T=50cm	m3	-	7,019	7,019
3.02 프라임코팅	RSC-3	m2	14,038	14,038	-
3.03 텍코팅	RSC-4	m2	77,919	77,919	-
3.04 아스콘 기층
a. 기층 포설 및 다짐	T=20cm	m2	14,038	-	-14,038
b. 기층 포설 및 다짐	T=17cm	m2	-	14,038	14,038
3.05 아스콘 중간층			14,038	14,038	-
a. 중간층 포설 및 다짐	T=20cm	m2	14,038	-	-14,038
b. 중간층 포설 및 다짐	T=13cm	m2	-	14,038	14,038
3.06 절삭 후 아스콘 덧씌우기
a. 절삭 후 아스콘 덧씌우기	t=5cm(연속구간),야간	m2	21,767	21,767	-
나.관급자재대		식
7.01 아스콘
아스팔트콘크리트	WC-3,1등급,표층	ton	2,597	2,597	-
아스팔트콘크리트	WC-5,1등급,표층	ton	6,701	4,355	-2,346
아스팔트콘크리트	BB-4,기층	ton	6,643	5,647	-996
조달수수료	0.54%	%	1	1	-

□ 공사비 증·감 현황

【단위 : 천원】

구 분	당 초	변 경	증•감	비 고
3.포장공
도급금액	********	********	********
관급자재비	********	********	********
총공사비	*********	*********	********

4		검토결과

❍ 구로고가 철거공사의 포장구간은 남부순환로상 위치하므로, 남부순환로의 교통량을 적용하여 적절한 포장두께를 시공함이 경제성 및 포장내구성 확보에 적정한 것으로 판단되어 건설사업관리단 보고내용과 같이 시행하고자 함.

5		조치계획

❍	위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하고 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 승인요청문 1부.  끝.