문서번호	정수시설과-885
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양경현		백상희	03/20 서대훈
협 조

(중앙제어실 및 염소투입동)

분산제어(DCS) 현장제어반 제작·구매 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

(중앙제어실 및 염소투입동)

분산제어(DCS) 현장제어반 제작·구매 시행계획

장기간 사용으로 인한 노후로 성능이 저하된 분산제어(DCS) 현장 제어반 교체를 통하여 안정적인 제어시스템의 운용으로 시민이 믿고 마실수 있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

1		현황 및 목표

□ 시설현황

구 분	합 계	송수 펌프동	약품투입동 (#1,2)	약품투입동 (#3,4)	여과지동 (#1,2)	여과지동 (#3,4)	중앙 제어실	염소 투입동	비 고
현 장 제어반	11면	3면	1면	1면	2면	2면	1면	1면	1998년 설치

□ 목 표 : 현장제어반 교체 완료로 본래의 기능유지로 안정적 제어시스템 운용

구 분	수량	교 체 대 상	비 고
2018년	9면	송수펌프동, 약품투입동, 여과지동	완 료
2019년	2면	중앙제어실, 염소투입동	교체예정

1		추진개요

□ 사 업 명 : 분산제어(DCS) 현장제어반 제작·구매설치

□ 기    간 : 2019. 3. ~ 8.

□ 방    법 : 조달구매(지명경쟁입찰)

□ 소요예산 : 279,562천원

□ 주요내용

○ 중앙제어실 및 염소투입동 현장제어반 교체 1식

○ 제어프로그램 설치 1식

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

2		추진계획

□ 물품 제조·구매 계약심사

○ 근    거

- 2019년 상수도사업 계약심사 추진계획(안전총괄과-643, ’2019.1.22.)

- 물품 제조·구매 : 조달구매 2천만원 이상 사업 본부 계약심사

○ 심사요청 : 2019. 3. 26.(특정제품선정심의위원회 심사 후)

○ 심사부서 : 상수도사업본부 안전총괄과

□ 분산제어(DCS) 현장제어반 구매

○ 발주방법 : 조달구매(지명경쟁입찰)

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제22조 제10호

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 및 제7조1항

○ 지명경쟁 업체 선정방법

- 선정방법 : 한국계측시스템공업협동조합에 우수업체(5개업체)를 추천의뢰 하여 선정

- 추천기준

· 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 면허를 소지한 업체

· 프로세스제어반(물품분류번호 41112498) 직접생산증명서를 소지한 업체

○ 발주예정일 : 2019. 4. 1.(본부 계약심사 완료 후)

3		세부추진계획

□ 특정제품선정심의위원회 개최

○ 개최개요

- 안    건 : 분산제어(DCS) 현장제어반 교체에 따른 특정제품 선정심사

- 일    시 : 2019. 3. 22.(금) 15:00

- 장    소 : 1층 소회의실

- 방    법 : 위원회 구성 심의 (외부위원 3명, 내부위원 3명)

- 주요내용

· 중앙제어실 및 염소투입동 제어반 1식

· 제어프로그램 1식

○ 위원회 구성

- 위원장 : 기관장(강북아리수정수센터 소장)

- 위  원 : 5명(외부 3명, 내부 2명)

구 분	외 부 위 원		내 부 위 원		비고
	소 속	성 명	소 속	성 명
심의위원	한국폴리텍대학	신석하 교수	정 수 과 장	김형섭
	한빛디엔에스(주)	이현화 대표
			원수관리과장	유통희
	D2엔지니어링	정찬웅 부사장

※ 중앙제어실 및 방호실 모니터월 시스템 특정제품선정 심의와 병행시행

4		행정사항

□ 분산제어(DCS) 현장제어반 물품 구매발주 : 2019. 4. 1.

○ 계약심사 완료 후 조달구매 (지명경쟁입찰)

□ 현장제어반 교체 후 발생자재 : 고재처리

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 특정제품선정심의 요청서 1부.

3. 특정제품선정 심의 사전 검토 보고서 1부.  끝.