문서번호	급수운영과-4981
결재일자	2019.3.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고태우		03/22 박희철
협 조

상수도관 원인자이설공사 착공계 검토 보고(세곡동 613)

상수도관 원인자이설공사

착공계 검토 보고(세곡동 613)

2019. 3.

급수운영과

【 LH가 사업준공(2013년)한 서울강남 보금자리주택지구 조성공사】에서 부설한 상수도관 중 세곡동 613번지 사유지내에 상수도관 부설됨이 발견되어 상수도관 이설 요청공사 관련 착공계가 접수 됨에 따라 내용검토 후 아래와 같이 보고합니다.

2019. 3.

보고자 : 시설 8급 고태우

1. 현   황

가. 서울강남 보금자리주택지구 조성공사 내 상수도관로(200mm)가 세곡동 613번지 사유지를 침범하여 원인자 이설시행코자함

※ 관련공문 : 한국토지주택공사 서울품질관리부-471(2019.03.07.)

나. 이설 공사개요

위 치	이설 대상		조치의견	비고
	구경(㎜)	연장(m)
*******	200	6	공사가능(승인조건 이행후)

위치도	저촉 상수도(D=200, L=6m)

2. 주요 검토사항

가. 사급자재 적정 사용

품명	규격(mm)	제조회사	KC인증	검토의견
KP조인트용 압륜,볼트,너트	D=200mm	대륭금속㈜	해당없음	적정
닥타일주철이형관	D=200mm	㈜신명	KCW-2011-00107	〞

- 검수예정 : 사업소 담당자 8급 고태우외 1명, 건양엔지니어링 이사 정재성

시공사 ㈜한신공영 현장대리인 외 1명

나. 시공 상세도 적정여부 : 적정

다. 단수계획 적정여부 : 5세대(주변이 상업지구로 저수조급수방식을 사용함에 따라 주변 홍보 후 공사시행)

3. 추진계획

가. 이설일자 : 2019년 3월 23일 ~ 2019년 3월 23일 (08:00 ~ 18:00)

나. 공사중 직원입회 : 사업소 담당자 및 직반장 ,  건양 엔지니어링 이사 정재성

다. 본 공사 이설시는 상,하수도 면허 소지자가 시행토록 승인조건 사항에 부여하여 단수사고 대비 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1.상수도관 이설 승인 조건 1부.

2.착공계 및 관련서류 1부.

3.원인자 부담금 산출근거 1부.  끝.