구로고가 철거공사

도시미관 저해 및 노후된 구로고가를 철거하여 도시미관 향상을 향상하고 남부순환로로 인해 단절된 지역간 교통불편을 해소, 시민 편의 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 구로구 가리봉동 140(남부순환로, 디지털단지5거리 주변)

○ 규    모 : 고가차도 철거 폭 18.5m, 연장 536m

(보도확장 폭1.5m→3m, 연장1,000m 포함)

○ 공사기간 : 2018. 8. ~ 2019. 4.

○ 시 공 사 : 새천년종합건설 주식회사 외 2

○ 감 리 사 : ㈜동부엔지니어링 외 2

□ 추진현황

○ ‘16. 8.11.  : 서울시 고가차도 철거 등 관리계획(안)보고

○ ‘17. 4. ~ ‘18. 4 : 고가차도 철거 실시설계 시행

○ ‘18. 5.28.  : 교통안전시설 심의 완료(서울지방경찰청)

○ ‘18. 8.13.  : 공사계약

□ 구로고가 철거계획

○ 연중 교통량이 적은 겨울방학기간 활용하여 철거 시행

○ 고가철거 착수일(고가통제일) : 2018. 12. 11(화) 0시

- 고가철거시행 : 2018.12.11. ~ 2019.03.31.

․사당방향 부분통제(5차로중 3개차로) : 2018.12.11. ~ 2019.01.09.(30일)

․양방향 전면통제(5차로) : 2018.01.10. ~ 2019.02.28.(50일)

□ 향후계획

○ '18. 11. : 공사홍보, 보도자료 배포, 우회경로 안내 등

○ '18. 12. ~ '19. 2. : 고가철거

○ '19.  3. ~ '19. 4. : 보도확장 및 준공

□ 위치도 및 조감도

위치도
착공전
완공후

□ 완료 후 도면(디지털단지오거리)