문서번호		보건환경처-1656		차장		팀장	처장		본부장
등록일자		2019.03.18.
									03/18
결재일자		2019.03.18.
공개여부		대시민공개
				협조	예산처 처장
방침번호		본부장-42
					총무처 처장
					궤도처 처장(직무대행)
행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사
	지하철 대청소 세부 추진계획(안)
2019. 3.
보건환경처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

지하철 대청소 세부 추진계획(안)

Ⅰ		목 적

최근 고농도 미세먼지 비상저감조치가 발령됨에 따라 1~8호선 전 구간의 역사 및 터널 청소를 순차적으로 시행하여 침적된 오염물질을 제거하고 보다 쾌적한 이용환경을 제공하기 위함.

Ⅱ		관련근거

□ 지하철 미세먼지 관리 추진계획(서울시 도시철도과-1306호, 2019. 2. 1)

□ 2019년 새봄맞이 대청소 추진계획 알림 및 협조 요청(생활환경과-3190, 2019.3.4.

□ 지하철 대청소 추진계획(안)(사장-237호, 2019. 3. 11)

Ⅲ		청소개요

□ 청소기간 : 2019. 3. 17. ~ 4. 14

□ 대 상 : 1호선 10역(서울역~청량리) ☞ 순차적으로 전노선 확대 실시

대 상	3/17	3/24	3/31	4/7	4/14
내 역	서울역, 시청	종각,종로3가	종로5가, 동대문	동묘, 신설동	제기동, 청량리

□ 참여자

○ 공사직원 : 안전관리본부장 등 직원 312명

○ 자회사 직원 : 역사, PSD 청소 100명

○ 용역 시행 : 도상 고압세척 및 배수로 청소

Ⅳ		청소방법

구 분	청 소 방 법
D - 1일	고압살수차, 배수로 청소, 환기구 청소, PSD 청소
D - day	승강장 노반 및 벽체, PSD 삼각대
D + 1	역사청소 (대합실, 승강장, 계단)

※ 특수청소차량(고압살수차) : 청소 2~3일전 청소구간 살수

□ 대상 시설별 청소 방법

○ 역사 승강장 하부/노반 및 노반벽체

- 청소범위 : 역사노반, 역사 배수로, 역사 기둥, 섬식승강장 벽체 등

- 청소방법 : 승강장 물뿌리기·쓸기, 친환경다목적세정제로 닦기, 배수로 쓸기·줍기 등

○ 승강장 안전문 더미부 및 연단 먼지 제거

- 청소범위 : 승강장 더미부 및 삼각대 하부 이물질 제거 등

- 청소방법 : 친환경다목적세정제로 닦기 등

○ 배수로 청소 : 궤도사업소 궤도시설 보수보강공사 설계 변경으로 시행

- 청소 2~3일전 청소 시행

- 발생폐기물은 폐기물 처리 용역에 포함하여 반출

○ 역사 승강장 노반 고압살수기 임차 용역

- 도상 및 벽체 세척 등

○ 청소 전후 효과분석

- 승강장 더미부 먼지 측정기 설치

□ 총 소요예산 : 101백만원(2회차:80,953,767원)

구 분	사업명	계	3/10	3/17	비 고
계		100,669,680	19,715,913	80,953,767
위 탁 비	소 계	64,726,660	16,865,913	47,860,747
	역사 청소	16,606,000	14,754,279	1,851,721	일반관리비 반영
	승강장 안전문 청소	2,924,660	2,111,634	813,026
	폐기물 처리	8,496,000	-	8,496,000
	고압살수기 임차	35,200,000	-	35,200,000	10역 기준
	미세먼지 측정기 임차	1,500,000	-	1,500,000	1대, 15일 기준
수선유지비	배수로 청소	19,074,020	-	19,074,020
특별격려금		7,900,000	1,860,000	6,040,000	5주 금액
관서업무비		4,060,000	990,000	3,070,000	5주 금액
사무관리비		4,909,000		4,909,000

Ⅴ		부서별 협조사항

□ 역사지원처 : 터널 출입 관제 지조신청(역에서 신청)

□ 보건환경처 : 안전장비 지급 - 안전모, 안전조끼, 장화지급(역당 5켤레)

□ 기술계획처, 장비운영단 : 살수차, 물탱크차 청소 당일 청소 구간 운행 자제

□ 궤도처 : 2차 방침에 5~8호선 배수로 정비 용역 추가(예산반영)

□ 기계처 : 청소시간 환기가동(5시간)

□ 신호처 : 모터카 운행 통보(신호취급실 → 안전요원 유선통보)

□ 전기처 : 효과측정 관련 측정기 전원공급

□ 제1종합관제 : 단전 및 모터카 통과시 All-call 방송 실시

□ 안전계획처, 기술계획처 : 안전 및 청소 교육자료 준비, 교육자 지정

□ 기타사항 : 청소 참여자 교육 대주 금요일 17시 대회의실

Ⅵ		행정사항

□ 야간 청소작업 참여자는 2개월 이내 대체휴무 실시 – 7.5시간 부여

※ 야간 5시간 ×1.5 = 7.5시간

□ 예산 반영 – 예산처

○ 위탁비 : 47,861천원(매출원가/위탁비/외부위탁)

- 작업환경측정용역/보건환경처 → 역사청소/역사지원처, PSD 청소/승강장 안전문 관리단, 폐기물처리/궤도1사업소  예산 재배정

- 고압살수기 및 미세먼지 측정기 임차는 발주차액 사용

○ 수선유지비 : 19,074,020(매출원가/수선유지비)

- 궤도1사업소 궤도시설보수보강공사 예산 선 집행 후 재배정

○ 특별격려금 : 6,040천원(매출원가/복리비/기타/특별격려금)

- 여객운송활동비(지출)/총무처 → 공기질(미세먼지)/보건환경처 재배정

- 예산산출 : 302명×20,000원=6,040,000원

○ 관서업무비 : 3,070천원(매출원가/관서업무비)

- 여객운송활동비(지출)/예산처→ 공기질(미세먼지)/보건환경처 재배정

- 예산산출 : 307명×10,000원=3,070,000원

○ 소모품 비용(매출원가/ 일반운영비/사무관리비) : 4,909천원

- 임차기타(공기질 개선) 사업비/보건환경처 발주 차액 사용 후 재배정

Ⅶ		결 론

미세먼지 농도가 높고 환경이 열악한 1호선 승강장 바닥청소를 우선   시행하고 청소방법을 보완하여 지속 추진하고자 함

따로붙임 : 1. 소요예산 세부내역 1부.

2. 재료비 세부내역 1부.

3. 체크리스트 1부.  끝.

붙임 1.

예산 세부내역

□ 위탁비 : 47,861천원

구 분	단위	수량	단가	합 계(원)
계				47,860,747
역사청소	식	1	1,851,721	1,851,721
승강장 안전문	식	1	813,026	813,026
폐기물 처리	식	1	8,496,000	8,496,000
고압살수기 임차	식	1	35,200,000	35,200,000
미세먼지 측정기 임차	식	1	1,500,000	1,500,000

※ 역사 청소 및 승강장 안전문 위탁비는 일반관리비 및 이윤 포함하여 재산정.

□ 수선유지비 : 19,074천원

구 분	산출내역	합 계(원)
배수로 청소	10개역 × 205m(배수로연장) × 2(상하선) × 3,323원/m(계약단가) × 1.4(제경비)	19,074,020

□ 운영비 : 9,110천원

구 분	기준	단 가	인원수	합 계(원)
계				9,110,000
특별격려금	1인/일	20,000원	302	6,040,000
관서업무비	1인/일	10,000원	307	3,070,000

※ 임원 5명 특별격려금 제외

붙임 2.

청소용품 세부내역

□ 터널 청소용 : 8종 4,909천원

연 번	품 명	규격(기준)	단가(원)	수량	금 액
1	안전모	개	8,000	60	480,000
2	안전조끼	개	23,000	60	1,380,000
3	안전장화	켤레	16,000	10	160,000
4	가슴장화	개	30,000	60	1,800,000
5	고무장갑	켤레	2,800	90	252,000
6	방진마스크	개	1,500	270	405,000
7	작업장갑	켤레	900	270	243,000
8	우 의	개	700	270	189,000
계					4,909,000

붙임#3

청소 CHECK LIST

연번	세부업무		주관부서	담당자	준비사항	결과	비 고
1	청소방법 작성		기술계획처	양승곤	교육자료작성 및 교육자 지정, 청소임무 부여
2	수도전 위치 파악		역사지원처	박종경	수도전 급수여부 및 위치
3	용역반 호스 사용 여부		역사지원처	박종경	역 당 호스 4개 사용 여부
4	모타카 운행 여부		장비관리단 신호처	이우정 권영오	고압살수차 및 모터카 운행여부 파악		취급실→안전요원 유선통보
5	안전교육 및 통제		안전계획처	신승화	교육자료작성 및 교육자 지정
6	소요예산 확보		예산처	강형석	예산협의 및 배정
7	소모품 준비		보건환경처	오태균	청소 소모품, 장화, 걸레 등 1회용품 구매
8	인력 확보		보건환경처	박준희	섬식 40명, 상대식 30명
9	상황반 구성		보건환경처	박준희	역당 2명, 상황판 준비		서울역
10	지조신청		역사지원처	박종경	관제 지조신청		해당역 신청
11	모터카 통제		제1관제	신세현	관제 ALL-CALL방송
12	안전보호구 준비		보건환경처	오태균	안전모,안전쪼끼,호루라기,메가폰
13	청소 시행	D-1	해당부서	-	고압살수차, 배수로, 환기구, PSD(문)		용역시행
		D-Day	기술계획처	양승곤	승강장 노반 벽체, PSD(삼각대,제어반)
		D+1	역사지원처	박종경	역사 대합실, 승강장, 계단		용역시행
14	환기가동		기계처	정기혁	청소 전후 24시간 환기가동
15	청소 사전교육		보건환경처	박준희	교육시간, 장소 선정 통보		3/15 17시
16	식사장소 예약		보건환경처	오태균	역사 인근 예약(역장협조)
17	청소결과 보고		보건환경처	박준희	서울시, 임원		월요일 08시
18	청소역사 사전 답사		보건환경처	박준희	호스 4개 사용 여부, 문제점 점검
19	효과분석		보건환경처	박준희	측정기 설치