투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서초역~방배로간 도로개설공사 책임건설사업관리기술자 김정철귀하
(경유)
제목	“서초역~방배로간 도로개설공사” 조경공사(식재 및 시설물) 계획 변경에 따른 실정보고 승인통보

1. 서방관리 제19-188(2019.03.26.)호와 관련입니다.

2.「서초역~방배로간 도로개설공사」추진 중 공사 시점부 연장에 따른 터널상부 조경식재 계획에 대하여 주민요구사항 반영 등 녹지경관을 향상한 조경 설계와 가로수, 띠녹지대 등변경에 대한 서초구 요구사항을 반영한 실정보고 사항을 승인하오니 추후 설계변경 소위원회 심의를 득한 후 설계변경 시 정산․반영하여 주시기 바랍니다.

3. 책임건설사업관리기술자는 공사장 안전관리에 유의하여 시공하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 실정보고사항 검토보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	04/05 이임섭
협조자
시행	방재시설부-4839	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/		/	부분공개(5)