문서번호	물재생시설과-5332
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장
남은정		한상각	04/16 임춘근
협조

'19년 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역계획

2019. 4.

물순환안전국

(물재생시설과)

'19년 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역계획

하수도시설물 악취저감사업 추진시 필요지점 선정 및 사업효과분석 등 을 위한 하수악취 조사 용역을 실시하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2019년도 하수악취 저감 추진계획[물재생시설과-3047(3.7)]

□ 공공하수도 시설물 악취저감 추진계획[물재생시설과-3893(3.20)]

Ⅱ		용역개요

□ 과 업 명 : '19년 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역

□ 사업기간 : 계약일  ~ 2019.11.30

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적)

**************************

*****************************************************************************

******************************************************************************

*****************************************

○ 산출내역 : 상세내역 붙임 2) 내역서 참조

○ 예산과목 : 물재생시설과, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(214-05)

Ⅲ		과업내용

□ 조사지역 : 하수도시설물 악취저감사업 지역(25개 자치구)

○ 자치구별 악취저감사업 추진지역에 대한 사전협의 진행

□ 조사내용

○ 하수도시설물 악취저감사업 대상지역 악취조사 지점선정

○ 도시명소(명동, 홍대입구), 도시재생지역(창신·숭인) 악취 사전조사 및 악취저감사업 대상 선정

○ 악취저감사업 추진 전·후 악취조사 및 평가

□ 조사방법

○ 사업지역 인근 주요 하수관로 및 맨홀내 대기중 악취(황화수소) 24시간 연속측정

○ 대기 중 악취측정 총 280개소

Ⅳ		향후일정

□ 공고 및 발주(악취조사 업체 선정) : '19.4

□ 하수도 시설개선사업 추진 전 악취조사 : '19.5~7

□ 하수도 시설개선사업 추진 후 악취조사(분석 및 평가) : '19.8~11

붙임 1. 과업설명서 1부.

2. 산출내역서 1부.  끝.