				★ ◎
문서번호	기전사업부-1101			부 원			기전사업부장				마곡위례스마트사업단장
보존기간	30년										전결	03/25
				장재욱			박철규				김익성
결재일자	2019.03.25
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
마곡 U-City 실시설계 및 구축사업
불법주정차 단속장비 추가 건에 대한 검토 보고
		서울주택도시공사
(마곡위례스마트사업단 기전사업부)

불법주정차 단속장비 추가 건에 대한 검토 보고

(마곡 U-City 실시설계 및 구축사업)

우리공사에서 시행중인 마곡 U-City 실시설계 및 구축사업과 관련하여, 강서구 요청에 따른 불법주정차 단속장비 4개소 추가 설치 요청에 따른 실정보고사항을 검토한 감리검토의견서가 접수되어 다음과 같이 검토 보고 후 추진업무에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ. 관련근거

❍ 마곡지구 내 불법주차 단속용 고정형 CCTV 추가설치 요청

[강서구 주차관리과-25911호, 2018.12.03.]

❍ 마곡지구 내 불법주차 단속용 고정형 CCTV 추가설치 요청(발산역)

[강서구 주차관리과-26644호, 2018.12.12.]

❍ 마곡 U-City 조성 관련 강서구 요청사항 통보 및 검토 요청

[서울주택도시공사 기전사업부-4023호, 2018.12.20.]

❍ 마곡U-City 구축사업 불법주정차단속장비 4개소 추가 실정보고 관련 감리검토의견 요청

[㈜엘지씨엔에스 UCT-*******001호, 2019.02.26.]

❍‘마곡 U-City 구축사업 불법주정차단속장비 4개소 추가 실정보고’감리검토의견서 제출

[㈜케이씨에이 KCA2019-00270호, 2019.03.06.]

Ⅱ. 계약현황

계약명	계약자	계약기간	계약금액(원)	비고
마곡 U-City 실시설계 및 구축사업	㈜엘지씨엔에스	2010.09.29.~ 2019.06.30.	25,653,782,000

Ⅲ. 주요 추진현황

❍ 2018.12.03. 마곡지구 내 불법주차 단속용 고정형 CCTV 추가설치 요청(강서구→SH)

- 공항초, 공진초, 마곡GMC타워 인근 교차로에 대해 단속장비 3개소 추가설치 요청

❍ 2018.12.12. 마곡지구 내 불법주차 단속용 고정형 CCTV 추가설치 요청(강서구→SH)

- 발산역 인근‘똑순이아구찜사거리’교차로에 대해 단속장비 1개소 추가설치 요청

❍ 2018.12.20. 강서구 요청사항 통보 및 검토 요청(SH→LGCNS)

❍ 2019.02.26. 불법주정차단속장비 추가 실정보고 관련 감리검토의견 요청(LGCNS→KCA)

❍ 2019.03.06. 실정보고에 대한 감리검토의견 제출(KCA→SH)

Ⅳ. 검토내용

가. 강서구 요청 사항

- 마곡지구 내 불법주차 단속요청 민원 다량 발생과 행정안전부 점검 및 시의원 요구에 따른 어린이 보호구역 정비 필요에 따라 공항초교, 공진초교, 마곡GMC타워, 우성에스비타워 인근 교차로에 불법주차 단속용 고정형 CCTV 4대를 추가설치 요청.

나. 설치장소별 검토

- 설치 위치도

- 설치 검토

연번	설치장소	설치 사유	검토내용
1	강서구 마곡서1로 68 (공항초등학교)	행안부 점검에 따른 어린이보호구역 정비	- 기존에 구축된 마곡지구 자가망(유선망) 계통에 연계가 가능하며, 설치가능함. - 불법주정차 예방을 통한 어린이 보호 및 교통사고 유발 방지를 위해 단속장비를 추가 설치함이 적정하다고 판단됨.
2	마곡서로 33 (공진초등학교)	시의원 요구에 따른 어린이보호구역 정비
3	강서구 마곡중앙6로 16 (마곡GMG타워)	불법주정차 단속요청 민원 다발지역
4	강서구 강서로 375-8 (우성에스비타워)	역세권 및 민원다발지역	관로공사 필요한 토지가 사유지로 계통연계 곤란 인근 기설 단속장비 운영중으로, 추가 설치 부적정

다. 기술검토 내용

- 현재 구축 중인 마곡지구 자가망(유선망) 계통에 연계해 기존 선로 및 맨홀을 활용하여 구성하였으며, 실시설계 당시 설계한 자가망 구축 계획 및 인근 전원 인입계획 등을 고려하여 적정하게 설치 계획함.

Ⅴ. 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	변경사유	증감금액(천원)
불법주정차단속 카메라 추가	21대	24대 (3대 추가)	강서구 주차관리과 요청사항 반영	증) 177,922

※ 해당 증감금액은 추정금액으로서 설계변경 적용 시 다소 차이가 있을 수 있음.

Ⅵ. 기타사항 및 향후 추진계획

❍ 위 검토내용에 따라 추가 설치가 적정하다고 검토된 3개소에 대해, 공사 진행에 차질이 없도록 우선시공 지시.

❍ 신규비목 단가에 대한 기술심사 및 설계변경 진행.

붙임  1. 감리검토의견서(KCA)

2. 감리검토의견 요청(LGCNS)

3. 마곡지구 내 불법주차 단속용 고정형 CCTV 추가설치 요청

4. 마곡지구 내 불법주차 단속용 고정형 CCTV 추가설치 요청(발산역)

5. 마곡 U-City 조성 관련 강서구 요청사항 통보 및 검토 요청.  끝.