(붙임1)

선로시설 검측시스템 구축

경영목표

안전한 지하철 구축

소 속

성 명

직 급

사 번

기여도(%)

전기처

박원주

3급

21706276

40

전기처

정성영

4급

21711413

30

전기처

박재우

5급

21713025

30

사        례        내        용

□ 추진배경

○ 선로주변 시설물 유지보수를 위한 절대 시간 부족과 작업자의 감각에 의존한 점검 한계로 자동화, 과학화에 의한 지능형 시설물 관리 시스템 필요

○ 영업운행 중인 전동차에 설치하여 점검 시간의 제약 없이 전차선로 와 터널 천장면에 부착된 선로시설의 불안전 요소를 자동으로 검측하는 시스템 구축

□ 추진내용

○ 관련근거 :『SCM(Smart Connected Metro) 마스터플랜(안)

(사장방침 제152호, 2017.07.20.)

개선 전		개선 후
	⇨

○ 사업개요

- 구축대상: 지하철 1~8호선 전동차 12편성(’18년 2호선 1편성 시범설치)

- 기    간: 2018.1 ~ 2022.12

- 검측대상: 지하부 전차선로 및 토목구조물 천장면의 변형검측

지상 및 지하부 팬터그래프와 전차선간 충격지점 검측, 아크영상 검측

(※ 시범사업 종료 후 선로 측면, 하부 및 궤도, 신호분야 등 검측범위 확대 예정)

○ 추진경과

- ’17.07.19. 기술사양 자문회의 시행(시설공단, 철도공사 등 참석)

- ’17.07.20. SCM 마스터 플랜 수립

- ’17.07.26. 자문회의결과 사양 확정(아크, 충격검측 항목 추가)

- ’17.09.18. 원가조사용역 시행((사)한국산업경제연구소)

- ’18.02.12. 입찰공고(제 201*******00)

- ’18.03.27. 입찰제안서 평가결과 보고 및 낙찰자 선정

- ’18.04.04. 제작구매 설치 작수

	<계 약 내 용>
○ 건 명: 선로시설 검측시스템 제작구매 설치 ○ 계약기간: 2018.04.04. ~ 10.01(180일) / 시운전기간 별도 ○ 계약금액: 1,420백만원 ○ 업 체 명: 투아이시스(주)

- ’18.07.05. 철도안전관리체계 변경승인 계획보고(도시철도연구원-20737호)

- ’18.07.13. 예비위험도 분석 추진(안) 보고(전기처-21018호)

- ’18.07.23. 예비위험도 분석결과 보고(전기처-21169호)

- ’18.08.30. 철도안전관리체계 변경승인 요청(전기처-21966호)

- ’18.10.12. 물품납품검수

- ’18.10.12. 2호선 본선 시운전 개시

- ’18.12.11. 선로시설 검측시스템 구축관련 시스템 연계 및 확대구축(안)

(사장방침-20620호)

․서울교통공사 시스템 구축 표준(안) 마련, 검측시스템 신설, 관리를 위한 전담조직 신설 등

- ’18.12.31. 철도안전관리체계 변경승인(국토부 철도안전정책과-5982호)

- ’18.03.19. 홍콩 Asia Pacific Rail 2019 행사 발표 및 전시

․기간: ’19.3.19(화) ~ 3.20(수), 2일간

․장소: HongKong Convention & Exhibition Centre

․내용: 검측시스템 소개 발표 및 전시, 설명회

* Asia Pacific RAIL : 세계 각지 철도관련 조직의 임원이 참여하는 아시아 태평양에서 큰 영향력을 가진 유일한 철도 이벤트

- ’18.04. 현재 시스템 안정화 및 검증, 시스템 학습을 위한 결함 모의변형 작업(시운전) 진행 중

□ 개선효과

○ 정량적 효과

- 통합 Web 서비스 제공(고장장애 복구(신속대응) 30분↓)

- 영업운행중 시설물 변형 등 실시간검측(점검속도 10배↑)

- 시스템에 의한 결함 인식율 80%, 결함검출율 90%

○ 정성적 효과

- 자동화 점검으로 유지보수품질(Maintenance-Quality) 향상

- 검측자료 자동분석에 의한 계획/점검 → 유지보수 과학화

- 영상/데이터에 의한 고장원인 분석/대책수립 → 예방정비

- 점검(정비)패턴 및 축적데이터 기반의 유지관리 업무처리

- 시스템에 의한 상관관계 분석, 타켓팅(Targeting) 점검

- RAMS 등과 연계 장기데이터 분석으로 교체 및 보수 시점 예측

□ 횡단전개 가능성

○ 국내 도시철도 운영기관 중 선로시설에 대한 주‧야간 상시 검측환경을 구축한 최초의 사례로 검측시스템 우수성 입증

- 강체전차선로 T-Bar 변형검측을 세계 최초로 도입

- 타 운영기관과 달리 선로시설 검측과 변형분석 동시 시행

- LTE망을 활용하여 변형분석 결과 문제개소(이미지포함)에 대한 실시간 알람 가능

○ SMBS(서울교통공사 사내방송) 기획보도(2건)

- 일시 : ’19.03.27(수) / 04.03(수)

- 내용 : 검측시스템 해외소개 및 컨퍼런스 발표 /

선로시설 검측시스템 소개(담당자 인터뷰) 등

□ 향후계획

○ ’19년 12월 까지 검측시스템 추가 도입 예정(2편성 : 5, 7호선)