투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전 [공사기한 연장 승인 알림(서초역~방배로 간 도로개설 전기·통신공사)]

1.업무지시현장 : 서초역 방배로간 도로개설 전기공사(장기)-도기본[장기-1차] 주식회사

케이지엔지니어링종합건축사사무소, 서초역~방배로간 도로개설 통신

공사(1차) 도영정보통신, 서초역 방배로간 도로개설 전기공사(장기)-

도기본[장기-1차] (주)용백전설, 서초역~방배로간 도로개설 통신공사(

1차) 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소, 서초역 방배로간 도

로개설 전기공사(장기)-도기본[장기-1차] 주식회사 제일엔지니어링종

합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-05-03 17:05:37

3.지 시 내 용

가. 제일(발)-2019-1162호(2019.04.24.), 서방관리 제19-301호(2019.04.26.)와 관련입니다.

나.「서초역~방배로 간 도로개설 전기·통신공사」의 공사기한 연장 승인 요청에 대하여 아래와 같이 계약 체결되었음을 알려드리오니 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 계약체결 내용

구 분		당 초	변 경	증·감
전기	총차	’17.03.06.~ ’19.04.30.	’17.03.06.~ ’19.05.15.	증) 15일
	2차	’18.11.19.~ ’19.04.30.	’18.11.19.~ ’19.05.15.	증) 15일
통신	총차	’17.02.20.~ ’19.04.30.	’17.02.20.~ ’19.05.10.	증) 10일
	2차	’18.12.06.~ ’19.04.30.	18.12.06.~ ’19.05.10.	증) 10일

끝.

주무관							김수진			시책사업과장					05/03 임병국
협조자
시행			설비부-6540									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8646						/전송			02-3708-8659					/	tnwls0169@seoul.go.kr												/	대시민공개