문서번호	시설과-2099
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	홍순철	변규열	06/13 이춘희
협 조
	공원운영과장		김제중
	주무관		김덕수

시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금 시행 계획

2014. 6.

동부공원녹지사업소

(시설과)

시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금 시행 계획

2014년 녹색자금사업 실시설계용역(시립고덕양로원 등 2개소)완료되어, 아래와 같이 공사시행 계획을 수립하여 추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사 개요

❍ 공 사 명 : 시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금 시행공사

❍ 대상지 및 규모

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	총사업비	비 고
	계		1,127	132
1	시립고덕양로원	강동구 고덕로 199	1,014	95	지상부
2	구립서초남서울어린이집	서초구 반포대로 310-5	113	37	지상부

❍ 총공사비 : 119백만원(도급 112백만원, 관급 7백만원)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일간

❍ 공사내용

- 사회복지시설 내 녹색공간 조성

□ 추진 경위

❍ 2014. 1.21    : 사업시달(조경과→동부사업소)

❍ 2014. 2.13    : 사업추진계획 수립

❍ 2014. 3.20 ~ 5.16 : 실시설계용역 시행 및 준공

❍ 2014. 5.19 ~ 5.27 : 자체설계심사

❍ 2014. 6. 3	: 설계용역 결과 보고(조경과)

❍ 2014. 6. 5	: 녹색자금 공사비 요청(동부사업소→조경과)

❍ 2014. 6. 12	: 녹색자금 공사비 배정(조경과→동부사업소)

□ 공사시행 계획

❍ 공사 입찰 및 관급자재 구매방법

- 공사입찰방법 : 전자공개수의계약

(지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조제1항제5호)

· 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 조경공사업으로 등록한 업체로 주된  사무소가 서울시에 소재한 업체

- 관급자재 구매 : 등의자 등 2종(7백만원)

· 조달청 3자단가 계약

❍ 업무담당(감독)자 지정

- 감독 : 임기제 8급 최종성(자체감독 시행)

❍ 대상지별 예산집행

- 예산과목 : 세입세출외 현금(녹색자금)

- 예산현황

(단위:천원)

연번	대상지	총예산	설계용역				일반 관리비	공사		비고
			배정액	발주액	계약액	잔액		배정액	발주액
	합계	132,000	10,000	9,482	9,010	990	3,000	119,000	119,000
1	시립고덕양로원	95,000	7,000	6,765	6,429	571	1,000	87,000	87,000	관급자재 포함
2	구립서초 남서울어린이집	37,000	3,000	2,717	2,581	419	2,000	32,000	32,000

□ 추진일정

❍ 2014. 6.	: 공사 발주 및 관급자재 구매요청

❍ 2014. 8.~ 10.: 공사시행

❍ 2014. 11.     : 녹색사업단 현장 실사 및 시설물 인계. 끝.