문서번호	동물기획과-4450
보존기간	년
결재일자	2014.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	동물기획과장	동물원장
협 조
	총무과장
	동물병원장
	주무관
	전문관

해양관 보수공사에 따른

돌고래 5수 수송 계획

서울대공원

(동물기획과)

해양관 보수공사에 따른

돌고래 5수 수송 계획

해양관 보수․보강 공사로 관리중인 돌고래 5수를 울산(고래생태

체험관)으로 다음과 같이 이동 관리 하고자 함.

해양관 보수․보강 공사 추진일정

❍ 2014.  3.  1 ~ 5. 12 : 에어돔 보수설계

❍ 2014.  5. 13 : 공사시행계획 수립

❍ 2014.  5. 15 : 에어돔 구매설치 발주

❍ 2014.  5. 30 : 해양관 보수·보강공사 발주

❍ 2014.  6.  1 : 착수(에어돔 및 철골트러스 보수)

❍ 2014.  6. 19 : 돌고래 이동

❍ 2014.  6. 20 : 착공(해양관 보수·보강공사)

❍ 2014.  9. 20 : 보수·보강공사 완료

❍ 2014.  9. 20~ : 해수 반입시작 1,800톤

❍ 2014.  9. 30 : 돌고래 원상이동

❍ 2014. 10월초 : 생태설명회 재개

돌고래관 공사 일정

❍ 6.20~8.31 : 풀장 및 천정 보수 공사 마무리

❍ 9.01~9.20 : 풀장내 시멘트독 및 페인트냄새 우려내기 위해 풀장내 물채우고 청소완료

❍ 9.20 : 해수도입을 위한 풀장 청소 및 소독

❍ 9.20 ~9.28(해수18,000톤) 총 72대(25톤:1대)

- 1차 : 여과기가동을 위해 최소 500톤(20대)이 필요

(19시부터 1시간 30분 간격으로 25톤씩 반입)

- 2차 : 나머지 52대는 7일~10일간 나누어 반입

❍ 9.29 : 돌고래관 해수반입 완료후 전체적으로 점검

❍ 9.30 : 돌고래5수 반입

돌고래 수송계획

❍ 현  황

연번	이름	나이	성별	참고사항	비고
1	태지	약 10~11세	수컷	체중 약 230kg	큰돌고래
2	금등	약 21～12세	수컷	체중 약 200kg	남방큰 돌고래
3	대포	약 20~21세	수컷	체중 약 190kg
4	복순	약 16세	암컷	턱, 주둥이가 비뚤어져 있음.
5	태산	약 19세	수컷	주둥이 5cm가 포식자로부터 잘린 것으로 추정

❍ 돌고래 수송 준비물

품 목	개 수(EA)	비 고
수송통	5	o
담가 셋트	5	o
스폰지	대 5, 소 15	구입 예정
타올	대 10, 소 10	o
바가지	5	o
호스	5	o
아이스 박스	10	o
담가 장착 로프	2	o
수온계(디지털)	5	구입 예정
플라스틱의자	7	구입 예정
얼음(각 얼음)		o
방수 저울	1	구입 예정

- 현수막 준비 5개소(돌고래관앞, 홍학사앞, 코끼리열차, 정문, 큰물새장)

: 돌고래관 공사로 인하여 돌고래 생태설명회 중단한다는 내용

❍ 출장일시 : ‘14.06.19(목)~20(금)

❍ 수송일시 : ‘14.06.19(목)

❍ 수송 일정

- 서울대공원 →울산(고래생태체험관)약 400km 소요(6~7시간 소요)

- 수송준비 완료 후 냉방 탑차 2대를 이용 각 3수, 2수 이동

- 돌고래 사육사 5명 및 수의사 동승

❍ 출장인원 : 12명(동물원장, 동물기획과장, 유미진, 여용구, 박상미, 박창희, 서완범, 김호진, 선주동, 김호민, 김민수, 이형종)

❍ 수송 세부일정

2014.6.4.(수) : 사전 해수 수질 검사

▷ 사육사 1명 울산 출장 및 직접 검사(pH, 수온, 염도 등)

2014.6.17.(화) 2일전

▷ 울산에서 돌고래 1차 사료준비(약 2개월분) - 심형은 출장

(고등어 : 120kg, 열빙어 : 60kg, 전갱이 : 60kg)

▷ 대여풀장 내 동물관리를 위한 CCTV 설치 – 유미진 팀장 출장

▷ 16:00  캘리포니아 바다사자 이동(꼬마, 우리, 망고)

해양관 내실 각 1두씩 이동 관리

(물범 반입으로 내실 부족시 : 꼬마 1실, 우리,망고 1실 관리)

▷ 17:00  돌고래 3수 내실 이동(내실 5수)

▷ 21:00  풀장 배수시작(총 배수 시간 : 33시간)

2014.6.18.(수) 1일전

▷ 수송관련용품 및 일정 재점검(울산풀장 재확인)

▷ 사육관련용품 준비(조리도구 및 잠수 장비등)

▷ 지게차, 탑차(4.5톤 무진동 윙바디 2대) 해양관 도착시간 확인

▷ 돌고래 운송 케이지 준비(세척 및 셋팅) - 해양관 이동

2014.6.19.(목) 당일

▷ 05:00 ~ 06:00

: 포획 및 운송 준비(담가,타올등)

: 돌고래 운송 케이지 5개 급수

▷ 06:00 ~ 08:30

: 배수 완료 후 내실 풀에서 돌고래 포획 시작

※ 포획방법 : 내실 5수(태산,복순,금등,대포,태지,) 1두씩 포획 지게차로 케이지 이동 및 차량 탑재

※ 포획인원 : 동물관리 8명(팀장, 해양관사육사 6명, 한마당 2명), 공무직 2명 공공근로 1명

※ 진료팀 : 출발전, 수송중간, 도착 후 채혈 및 건강 상태 점검,

▷ 09:00 : 관리 물품 탑재 완료 후 서울대공원 출발 - 탑차

선발대 출발(박창희-ktx)

▷ 14:00 : 선발대 울산 도착 :  크레인, 지게차 준비 등 총 점검

▷ 16:00 : 울산(고래생태체험관) 도착

▷ 18:00 : 돌고래 5두 관리풀 이동 완료

차량	1호차(태산, 복순)	2호차(금등, 대포, 태지)
선탑	동물원장	동물기획과장
동물관리	여용구, 박상미, 김호진	유미진, 서완범, 선주동,김호민

▷ 당일 울산 숙박

2014.6.20.(금)

▷ 09:00 돌고래 점검 후 귀청

- 돌고래 수송 후 서울대공원 복귀시 스타렉스 및 KTX 이용

- 현지 출장 직원 중 일부 추가 잔류

향후 계획

❍ 울산 돌고래 관리명단 : 돌고래팀 2명 상주 2~3주에 한명씩 교대 근무

※ 근무조 별도 편성

❍ 관리기간 중 정기적 건강검진, 일지작성

❍ 설치된 cctv로 스마트폰, 컴퓨터를 이용하여 상시 모니터링

❍ 이동전 해양수산부 사전 이동 통보

소요예산

- CCTV 3대 돌고래 관찰용 : 1,300천원(3대 구입 및 설치)

▷ 예산과목 : 서울대공원, 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 동물 관리프로그램 운영, 일반운영비

- 풀장 소독용 염소 : 1,540천원

▷ 350원/kg X 1000kg/월 X 4개월 = 1,400천원(부가세 별도)

▷ 예산과목 : 동물관리프로그램 재료비

- 생태설명회 중단 현수막 : 300천원

▷ 예산과목 : 동물관리프로그램  사무관리비

- 방수 저울 구입 : 500천원

▷ 예산과목 : 서울대공원, 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 동물 관리프로그램 운영, 자산취득비

(해양관 냉온풍기 구입 집행 후 잔액 사용)

- 돌고래 운송 관련 비용 지급 : 2,585천원

▷ 4.5t 무진동 윙바디(900,000X2대)+과천 지게차(70,000원/시간X2시간)+울산 지게차(80,000원/시간X2시간)+울산 포크레인(250,000원/반나절)=2,350,000원(부가세 별도)

▷ 예산과목 : 세계유수동물원과 교류 및 동물확보, 사무관리비

- 출장비 : 실비정산

▷ 예산과목 : 서울대공원, 행정운영경비, 기본경비, 국내여비.  끝.