문서번호	박물관과-6441
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시민생활사박물관조성추진반장	박물관과장
박재형	김양균	06/17 최원규

『구 북부법조단지 환경개선 및 서울생활사박물관 영상기록화 사업』

계약기간 연장 계획

2019. 6.

문 화 본 부

(박물관과)

『구 북부법조단지 환경개선 및 서울생활사박물관 영상기록화 사업』

계약기간 연장 계획

서울생활사박물관 건축, 전시물 제작 설치 등 영상기록화 사업의 선공정이 기간연장 됨에 따라 ‘구 북부법조단지 환경개선 및 서울생활사박물관 영상기록화 사업’의 계약 기간을 연장하고자 함

□ 연장사유

❍ 건축 준공의 연기로 건물 외부 타임랩스 영상 촬영 일정에 차질

************************************************************************************이를 촬영해야 하는 기록화 사업 용역 기간의 연장 불가피

❍ 전시물 설치 용역 준공의 연기로 내부 전시장 촬영 일정에도 차질

************************************************************************************이를 촬영해야 하는 기록화 사업
용역 기간의 연장 불가피

□ 연장개요

❍ 계 약 명 : 구 북부법조단지 환경개선 및 시민생활사박물관 영상기록화 사업

❍ 계약금액 : ********

❍ 용역업체 : ***************************************************

❍ 연장기간 : 2개월 연장

*********************************************************

*********************************

□ 향후계획

❍ ’19. 6월 : 재무과 계약변경(기간연장) 의뢰

❍ ’19. 6월 : 최종보고회 개최 및 용역 완료(성과품 납품).

***************************************************************

*********************************************************************