	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	항동지구 도로안내표지판 설치공사 검토

구로구 교통행정과의 도로안내표지판 문안심의 결과에 따라 항동지구 내 도로 조성에 따른 도로안내표지판 설치공사를 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 항동 공공주택지구 조성공사

○ 위    치 : 서울시 구로구 항동 일원

○ 공사기간 : 2015.10.27. ~ 2019.05.31.

○ 도 급 자 : 새천년종합건설(주) 외 1개사

○ 도 급 비 : 30,032백만원

나. 관련근거

○ 2019.03.05. : 도로안내표지판 문안 심의 결과 회신(구로구 교통행정과-10111호)

○ 2019.03.05. : 도로명안내표지 설치 요청(구로구 교통행정과-13525호)

다. 검토내용

○ 구로구 교통행정과의 도로안내표지판 문안심의 결과에 따라 항동지구 내 도로 조성에 따른 도로안내표지판 설치공사를 시행하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 단가 검토

- 신규공종 : 협의율 적용[100+75.46]/2=87.73%]

※ 견적발주부-639호(2019.04.29)로 기술심사 완료(별도의견없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비고
직접공사비	-	356,135	증)	356,135
제잡비 및 부가세	-	114,745	증)	114,745
도 급 액	-	470,880	증)	470,880
지급자재	-	98,175	증)	98,175
총공사비	-	569,055	증)	569,055

라. 조치계획

○ 상기 검토내용은 설계변경심사위원회에서 원안가결된 사항으로 사업의 시급성을 감안하여 우선 시행하고 추후 설계 변경시 정산·반영코자 함.

붙임  1. 의결안(제2019-3회)-항동지구 광역상수도 및 재이용수관로 공사 외 2건

2. 부의안 및 설명서-항동지구 광역상수도 및 재이용수관로 공사 외 2건

3. 설계변경시 조성원가 대비 공사비 검토(항동공공주택지구 조성공사)

4. 실정보고사유서(항동도로이정표지판)_최종

5. 실정보고내역서(항동도로이정표지판)_최종

6. 수량산출서 - 도로명 이정표 설치공사 (일반) 190507.  끝.

부 원						도시조성부장				도시공간조성처장			도시공간사업본부장		05/16
		설재훈						명경선			박영욱			김소겸
협조자
일 상 감 사	감사실장		김영준				감사일자 :	2019/05/16		감사일련번호: No.			감사의견여부 :	의견없음

시행			도시조성부-2527				(2019.05.16)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7641			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개