실 정 보 고

(도로안내표지판 설치공사)

2019. 03.

항동공공주택지구조성공사

Ⅰ. 실정보고 사유

1. 도로안내표지판 설치공사

1-1. 도로안내표지판 설계가 당초 수량에서 누락이 되었으며, 기 구두지시한(2018.12) 내용 및 문안 심의 결과에 따라 실정보고 하고자 함.

※ 공문: 항동지구 도로안내표지판 문안 보완 및 지주기초 관련 업무지시_도시조성부-1061(2019.03.01.)

1-2. 항동지구 도로표지 문안 심의결과

가. 항동지구 도로명 부여 등-2019.2.7

1) 항동지구 도로명안내표지 정비 검토서

2) 서울특별시 구로구 도로구간 및 도로명 부여-폐지 고시알림

3) 도로구간 설정 및 도로명 부여 고시문

4) 도로구간 설정 및 도로명 부여 결정 조서

5) 도로구간 설정 및 도로명 부여 결정 도면

6) 도로구간 및 도로명 폐지 고시문

7) 도로구간 및 도로명 폐지 결정 조서

8) 도로구간 및 도로명 폐지 결정 도면

Ⅱ. 수량 및 공사비 증‧△감 현황

품 명	규 격	단위	수 량			공 사 비(천원)			비고
			당초	변경	증․△감	당초	변경	증․△감
1. 도로안내표지판 설치공사
1) 표지판 설치	1	식	-	-	-	-	341,673	341,673
2) 노선유도표지 설치	1	식	-	-	-	-	6,713	6,713
3) 기존 표지판 철거	1	식	-	-	-	-	7,749	7,749
직접공사비						-	356,135	356,135
제 경 비						-	114,745	114,745
도 급 액						-	470,880	470,880
지 급 자 재						-	98,175	98,175
총 공 사 비						-	569,055	569,055

Ⅲ. 시공사 의견

1. 항동 도로안내표지판 문안 보완 및 지주기초 관련 업무지시접수(2019.03.01)에 따른 수량 및 공사비를 상기와 같이 반영함이 타당하다고 판단됨.

붙 임 : 1. 실정보고 내역서 1부.

2. 단가산출서 1부.

3. 수량산출서 1부.

4. 관련도면 1부. 끝