투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약의뢰-여의도샛강 분류부 생태거점조성 전기공사

1. 우리 본부에서 추진중인 『여의도샛강 분류부 생태거점조성 전기공사』에  대하여            아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 여의도샛강 분류부 생태거점조성 전기공사

나. 공사기간 : 2018. 4. 4 ∼ 2019. 12. 28

다. 도 급 액 : 115,336,300원

라. 도 급 자 : 한우이앤에스(주)    대표 변준석

마. 설계변경 사유

- 신규공정 및 현장여건 변동에 따른 물량 증ㆍ감내역 발생

바. 설계변경 금액                                                     (단위:원)

구 분	당초	변경	증ㆍ감	비고
도급비	115,336,300	82,883,000	감) 32,453,300

사. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강 자연성 회복, 여의도 샛강 생태거점 조성,

시설비100-401-01

첨부 : 1. 공단공문 1부..

2. 설계변경 보고서 1부

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제경비 검증확인서 1부.  끝.

	공원시설과장
주무관	임이환		공원시설과장	06/27 김호규
협조자	총무과장	박병현
시행	공원시설과-1968	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3780-0861	/전송	3780-0745	/		/	부분공개(7)