투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(가스설비공사 철거물량 관련 실정보고 승인통보_서울공예박물관 조성 기계공사)

1.업무지시현장 : 서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차) 주식회사거륜에너텍, 서울

공예박물관 조성 기계공사(장기1차) (주)무영씨엠건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-07-01 10:07:02

3.지 시 내 용

가. 무영공예CM 제2019-202(2019.06.26.)호와 관련입니다.

나.“가스설비공사 철거물량 변경”에 따른 실정보고 검토 결과 감리단 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하니, 차후 설계변경시 과산출된 가스매립배관 철거물량을 감하여 반영하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이지영			환경설비과장					07/01 김오열
협조자
시행			설비부-9910									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8620						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개