문서번호	박물관과-6971
결재일자	2019.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시민생활사박물관조성추진반장	박물관과장
강성신	김양균	07/01 최원규

서울생활사박물관 개관 도록 및 리플릿 제작 용역

계약기간 연장 계획

2019. 6.

문화시설추진단

(박물관과)

서울생활사박물관 개관 도록 및 리플릿 제작 용역

계약기간 연장 계획

서울생활사박물관 건축, 전시물 제작 설치 등 선 공정 기간이 연장됨에 따라 ‘서울생활사박물관 개관 도록 및 리플릿 제작 용역’의 계약 기간을 연장하고자 함

□ 연장사유

○ 건축 준공 연기로 박물관 외부 사진 촬영 일정 변경

- ****************************************************************************, 안내 리플릿 및 도록에 들어갈 박물관 외부 촬영 일정 연기 불가피

○ 전시물 설치 용역 준공 연기로 내부 전시장 촬영 일정 차질

- ‘*************************************************************************, 전시실 내부 안내를 위한 리플릿 제작 및 전시 유물을 보여주는 도록 제작 기간 연장 필요

□ 연장개요

○ 계 약 명 : 서울생활사박물관 개관 도록 및 리플릿 제작 용역

○ 계약금액 : 44,726천원

○ 용역업체 : ****************

○ 연장기간 : 1개월 연장

*********************************************************

※ 서울시 귀책 사유에 따른 연장 건으로 지체상금 미부과

□ 향후계획

○ ’19.7월중      : 재무과 계약변경(기간연장) 의뢰

○ ’19.7월중      : 도록 제작 및 발송.

******************************************************************

********************************************************************