투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	중랑물재생센터 슬러지 건조시설 설치공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 서윤석
(경유)
제 목	종합시운전 실투입일수 관련 승인요청에 따른 발주청 검토의견

1. 시설보수과-3101 (2019. 5.31.), 중랑슬관 2019-228 (2019. 5.27.), 중랑슬관 2019-250 (2019. 6.13.), 중랑슬관 2019-262 (2019. 6.16.)과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 이전에 여러차례 말씀드린 바와 같이 향후 2019. 6.1. ~ 8.16. (공기연장계획에 따른 공기연장기한일 반영, `19. 6.28. 제3회 공기연장 결정 전에는 2019. 9.30.까지)까지 건설사업관리단이 승인요청한 시운전비는 2019. 5.27.부터 부하시운전을 실시하고 있으므로 향후 시운전비에 필요한 실투입비용은 지급예정이라고 말씀드렸고, 시운전비용 문제로 인해 시운전기간에 장애가 발생되지 않도록 당부드린바 있습니다.

3. 시공사인 에너지관리기술(주)서 시행하고 우리센터의 감독권한 대행자인 건설사업관리단에서 감독하여 기 시행한 2019.3.1.~2019.5.31. 3개월간 무부하시운전비용에 대하여는 2019. 5.31. 우리센터에서 시행한 ‘종합시운전 기간연장 및 부하운전 추가 인력투입 승인요청 재검토 지시’ 공문 및 2019. 6.24. 제7차 업무조정회의시 안건으로 상정된 우리센터 발표자료 맨 끝 부분에서 알려드린 바와 같이 우리센터에서는 한 발 양보한 계약내용에 따른 1개월 비용 (시공사에서 요청한 3개월실투입비용의 1개월치보다 많은 금액)만 지급함이 타당하다는 의사를 밝힌 바 있습니다.

4. 2019. 3.1.~2019. 5.31. 3개월 시운전을 실시한 시운전비용 문제 (시공사 및 건설사업관리단 의견대로 3개월 시운전 실투입된 비용을 지급해야 하는지? 아니면 우리센터의 의견대로 1개월 계약내용상의 시운전비를 지급해야하는지?)가 발생한 원인, 시공사와 건설사업관리단에는 책임이 없는 것인지? 아니면 건설사업관리단의 판단 및 지시로 시운전일 착수일을 2019. 3.1.에 착수하게된 사안이므로 건설사업관리단에게만 책임이 있는 것인지? 아니면 우리 발주청에도 책임이 있는지? 계약내용의 일부인 건설공사 시방서의 내용 등에 대한 종합적인 법률적 검토가 필요하므로 조속히 법률자문을 실시하여 그 자문결과와 제7차 업무조정회의시의 자문위원의 의견 등을 참조하여 우리센터에서는 승인여부를 결정하도록 하겠습니다.

따라서 건설사업관리단에서는 2019. 6.28. 공기 및 용역기간 연장계획에 따라 건설공사의 공기가 2019. 8.16.로 연장되었으니 시공사 에너지관리기술(주)에서 2019. 6.1.부터 2019.8.16.까지 시운전비용을 산출토록하여 투입인력 등에 대한 적정성을 건설사업관리단에서 검토하여 우리센터로 실정보고하여 주시면, 검토하여  큰 문제가 없으면 승인처리하도록 하겠습니다.

5. 한편, 현재 시운전에 대하여 말씀드리겠습니다. 시운전 일일 상황보고서 및 시공사 시운전 하상윤 팀장의 의견에 따르면 해당 공사에서 설치한 모든 기계 설비가 2019. 5 .24. 무부하테스트가 끝마쳤고 2019.5.27.부터 부하시운전을 실시하여 현재까지 부하시운전을 실시하고 있으며 2019. 7.4. (목)까지는 성능보증시운전을 위한 부하시운전이 끝나는 것으로 예상됩니다.

따라서 2019. 7.4.부터는 건조시설을 최대의 성능으로 가동할 수 있는 여건이 만들어지기 때문에, 건설사업관리단에서는 시공사가 2019. 7.4.부터 건조부산물을 최대한 많이 생산될 수 있도록 시운전이 실시할 수 있도록 지시 및 관리감독하여 주시기 바랍니다. 그리고 그 시운전계획을 `19. 7. 3.(수)까지 우리센터로 실정보고하여 주시기 바라며 시운전 계획 실정보고서에는 다음과 같은 사항을 포함하여 주시기 바랍니다.

<`19. 7. 4.부터 시행하는 시운전 계획수립 시 고려사항 (매우 중요)>

첫째, 반드시 건조부산물이 최대한 많이 생산될 수 있도록  건조시설을 가동하여 주시기 바랍니다.

둘째, 시운전 투입인력을 시운전비와 직결되므로 효율적으로 운영할 수 있도록 투입 및 배치하여 주시기 바랍니다. (우선순위는 첫째, 둘째 순임)

섯째, 매일 탈수슬러지 공급이송량, 건조부산물 생산량을 확인하여 기재하여 주시기 바랍니다.

(유량계, 측정장치가 있으면 그 측정량을 기재하여 주시기 바랍니다.)

넷째, 시운전 인력이 내역서에 따른 투입인력이 투입되는지 여부를 점검하여 주시기 바랍니다.

또한, 2019.7.4.부터 2019.7.9.까지 시운전결과 (실태 및 문제점, 탈수슬러지 이송량, 건조슬러지 생산량 등 포함)와 향후 종합시운전 계획을  `19. 7.10.까지 실정보고하여 주시기 바랍니다.

5. 마지막으로 어떤 문제점이 발견되면 발견 즉시 조속히 그 원인 및 대책을 마련하여 그 때마다 우리센터로 보고하여 주시기 바라며, 또한 건설사업관리단은 발주청의 감독권한대행자로서 해당 업무내용 및 업무수행의 자세는 단순 설계서의 물량대로 시공사가 시공하였는지에 대한 검토를 하여 발주청의 재산상의 손해를 방지하는 것 뿐 아니라, 시운전 시에는 어떻게 시운전을 실시해야 발주청에 이익이 되는지도 검토해야 한다고 사료되니, 이점 유념하시어 신의성실한 마음으로 건설사업관리용역 업무를 수행하여 주시길 당부드립니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	윤정		주무관	안종필		운영과장	07/02 최영효
협조자	주무관	박영욱
시행	시설보수과-3705	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개