G밸리 산업관 건립추진 경과

1		G밸리 산업관 건립 추진

G-Square(舊 정수장 부지) 개발과 연계, 민‧관‧공(넷마블-市-산단공) 협력을 통한 서울시 최초의 산업관 조성

□ 추진배경

○ 산재되어 있는 G밸리 산업유산을 모아 체계적인 보존 및 활용 도모

○ 근로자, 지역주민 향유 문화‧여가시설 확충, 근로․정주여건 개선

○ G밸리 역사성‧상징성 담은 공간 조성, 산업관광코스로 개발․활용

※ “G-SQUARE(舊정수장부지) 개발을 위한 양해각서” 체결 (’16. 6.)

- 체결주체 : 서울시(시장) + 한국산업단지공단(이사장) + 넷마블(의장)

- 관련내용 : 산업단지공단, 넷마블(설치공간 제공) / 서울시(조성 및 운영)

□ 사업개요

○ 위    치 : G밸리 1단지 G-Square 건물 1층, 7층 일부

※ G-SQUARE 개발사업 개요 • 대지위치 : 구로구 구로동 832번지 외 3필지 • 건축규모 : 지하7층, 지상39층 / 연면적 172,552㎡ • 건축용도 : 업무시설(넷마블, 한국산업단지공단), 지원시설(산업관, 게임박물관, 컨벤션, 창업보육센터, R&D센터 등) • 건 축 주 : 지스퀘어피에프브이 주식회사 • 사업기간 : ’16.3.~’20.9.

○ 규    모 : 연면적 2,640m2(800평) / 전용면적 1,214m2(367평)

○ 사업기간 : ’16. 6. ~ ’21. 7

○ 총사업비 : 3,995백만원

○ 주요시설 : 상설전시실, G밸리 기업제품 체험관, 영상관, 수장고, 사무실

□ 추진현황

○  ’16. 6.          : G-SQUARE(舊 정수장부지)개발 위한 양해각서 체결

- 서울시, 한국산업단지공단, 넷마블 3자간 체결

- 산업관 공간 제공(한국산업단지공단, 넷마블), 산업관 조성․운영(서울시)

○ ’17. 10.         : 산업관 조성공간 기부채납 규모 확정(2,640㎡)

- 한국산업단지공단(860㎡), 넷마블(1,780㎡)

○ ’17. 7. ~ ’18 .8.    : 산업관 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

- 조성 기본계획, 관리운영방안, 사업타당성 분석   ※ 서울시-산단공 공동발주

○ ’19. 4. ~ 11.    : G밸리 산업관 전시계획 및 유물조사 용역

○ ’19. 4. ~         : G밸리 산업관 추진자문단 구성 (총 8명)

- 관련분야 외부전문가 6명 및 공공기관 학예연구관 2명

- 산업역사(1). 전시기획 및 콘텐츠(2), 전시디자인(2), 건축 및 공간디자인(1)

○ ’19. 9.            : 유물 수집계획 수립 및 홍보

□ 향후 추진현황

○ ’20. 2. ~ 8.      : G밸리 산업관 전시실시설계 실시

○ ’20. 8. ~ ’21. 2. : G밸리 산업관 전시물 제작 및 설치

○ ’21. 3. ~         : G밸리 산업관 전시 시운전 및 운영프로그램 점검

○ ’21. 7. ~         : G밸리 산업관 개관