투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	"난지물재생센터 단단터보 송풍기 제조 구매 설치" 계약기간 변경 시행

1. 시설보수과-1979호(납품기한 연기 검토 보고(2019년 송풍기 성능개선 사업), 2019.07.24.)와 관련내용입니다.

2. “난지물재생센터 단단터보 송풍기 제조 구매 설치” 사업의 계약기간 변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 계약 건명: 난지물재생센터 단단터보 송풍기 제조 구매 설치

나. 계약 금액: 금1,197,967,880원

다. 계약 일자: 2019.04.01.

라. 계약 업체: (주)남원터보원 (대표 이병학)

마. 변경 사유: 붙임 보고서 및 납품기한 연기 의뢰서 참조

바. 계약 변경 내용

구 분	변경 후	변경 전	비고
계약금액	금1,197,967,880원	금1,197,967,880원	변경없음
계약기간	2019.04.01. ~ 2019.09.11.	2019.04.01.~ 2019.07.30.	43일 연장

붙임	1. 납품기한 연기 검토 보고서 1 부.

2. 납품기한 연기 의뢰서 1 부.

3. 합의각서 1 부.  끝	.

	시설보수과장
주무관	우배용		시설팀장	이호복		시설보수과장	07/25 조선행
협조자
시행	시설보수과-2003	(		)	접수		(		)
우	10542	고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	300-8541	/전송	300-8587	/	woo332s@seoul.go.kr	/	대시민공개