납품기한 연기의뢰서

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

1. 계약내용

가. 계약건명: 난지물재생센터 단단터보 송풍기 제조 구매 설치

나. 계약업체: (주)남원터보원(대표 이병학)

다. 계약금액: 금1,197,967,880원(금일십일억구천칠백구십육만칠천팔백팔십원)

라. 계약년월일: 2019.04.01.

마. 납품기한: 2019.07.30.

2. 위 계약의 납품기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한: 2019.09.11.(43일 연장)

나. 연기사유 귀책 소재: 서울특별시난지물재생센터

다. 지체상금 부과여부: 부과 없음.

라. 연기사유: 송풍기 5대 교체 사업으로, 송풍기동 정전과 관련하여 한강유역환경청과의 일정 협의가 지연(정전 일시, 자료 요청 등) 되어 납품기한 연기가 불가피 함.

2019년  7월 25일

작성자	난지물재생센터 시설보수과	지방공업주사	우배용
검토자	난지물재생센터 시설보수과	시설팀장	이호복
확인자	난지물재생센터 시설보수과	시설보수과장	조선행