「6호선 신내역(환승설비) 건설 관련」

철도종합시험운행 사전협의 내용

6호선 신내역(환승설비) 건설에 따라 사업구간인 신내차량기지 내 환승설비 구간의 종합시험운행을 시행지침에 의거, 사전점검, 시설물검증시험 및 영업시운전을 차질 없이 준비하여 성공적으로 개통하기 위함

철도종합시험운행 시행지침(제2018-634) 제2조(용어의 정의) 14항 : 철도노선을 새로 건설하거나 기존노선을 개량하여 운영하고자 할 때에 철도시설의 설치상태 및 열차운행체계의 점검과 철도종사자의 업무숙달 등을 위하여 영업개시 전에 시행하는 것을 말하며, 시설물검증시험과 영업시운전으로 구성된다.

1		관련 근거

가. 철도안전법 제38조(종합시험운행) 및 동법 시행규칙 제75조(종합시험운행의 시기․절차 등)

나. 철도종합시험운행 시행지침(국교부 고시 제2017-149호)

다. 신호처-21490(2018. 8.30.)「종합시험운행 업무협조 요청(3호선 관제개량 및 6호선 신내역 신호시스템 제작)」

라. 기술본부장 방침No-20115(2018.10. 4.)「6호선 신내 환승시설 공사 추진계획 보고」

마. 토목처-24935(2018.12.11.)「2019년도 종합시험운행 연간계획 제출(서울도시철도 6호선 신내역 환승시설 사업)」

2		시행 목적

가. 사전점검: 종합시험운행 시행 전 시험운행열차의 안전확보와 해당 철도노선에 설치된 철도시설물에 대한 기능 및 성능점검과 안전점검을 시행

나. 시설물 검증시험: 시설물의 정상동작 여부 확인 및 전동차와의 연계 적합성 확보 등

- 해당노선에 허용되는 최고속도까지 증속하여 철도시설의 안전상태 확인․점검

- 철도차량의 운행 적합성, 철도시설물과의 연계성(Interface), 철도시설물의 정상동작 여부 확인․점검

다. 영업시운전: 열차 운행체계 적정성 및 종사자 업무숙달 등의 점검 등

- 영업 개시에 대비, 열차운행계획에 따른 실제 영업상태를 가정하여 시행

3		대상 사업

가. 사업개요

노 선	개통 구간	종합시험 개시일	개통 기한
서울교통공사 6호선	봉화산~신내역(환승설비)	2019. 9.15.(예정)	2019.12.31

나. 총연장 : 1.76㎞ (봉화산(34k927) ~ 신내역(환승설비)(36k692))

다. 정거장: 1개역(신내역(환승설비), 신내차량기지 내)

라. 사업구간 위치도

마. 운행차량 편성수: 8량 39편성(총 312량)

4		주요시설물 현황

구 분	주요 시설물 현황	비 고
토 목	- 역 사 : 1개 정거장(승강장)
궤 도	- 궤 도 : 302m, 분기기 : 8틀
송변전	송배전선로 이설 : 1식, 변압기 증설 : 1식
전차선	- 강체전차선 : 1식, 기지 급전계통 분리
신 호	- 신호기계실 개량 : 2역(신내차량기지, 6호선 봉화산역) - 신호취급실 개량 : 1역(신내차량기지) - 궤도회로장치 : 73개(AF(PDT 포함) : 70, PF : 3) - 선로전환기 : 6틀, 신호기 : 2개 등	기존 외산장비를 국산장치로 개량
정보통신	- 열차무선케이블 : 1식 - 열차무선설비, 영상감시설비, 열차행선안내시스템
기계설비	PSD : 1역 - 엘리베이터 : 1대, 에스컬레이터 : 2대 화재수신반 : 1대

5		분야별 추진공정

가. 공종별 공정 진행내용

구 분	공 종	2018년						2019년																		비 고
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				5	6	7		8		9
시설물검증	궤 도							조사, 용접시험편 제작							궤도 철거 및 설치											19. 8.19. 완료예정
	신 호	계약 및 현장조사			신호설비 제작							신호설비 설치 및 현장시공														19. 9.15. 완료예정
																			공종시험
	전 기 (전차선)							계약 및 조사		지장물 이설						전차선로 조성										19. 8.31. 완료예정
	차 량														계약	TDB, 차내 방송 등 개량										19. 9.15. 완료예정
영업시운전	토 목					계약 및 현장조사				지장물 이설			승강장 구조물				노반, 도로복구									19. 6.30. 승강장 완료예정
	건 축								계약 및 조사		환승통로 설치						승강장 마감									19. 9.15. 완료예정
	통 신								계약	지장물 이설						선로 통신공사										19. 9.15. 완료예정
																	승강장 통신공사
	승 강 설 비								계약 및 조사		장비제작					설치				검사						19. 9.10. 완료예정
	역 사 전 기							계약	지장물 이설								승강장 전기공사									19. 9.15. 완료예정
	PSD														계약	PSD제작		PSD설치								19. 9.15. 완료예정
	기 계										계약						제어반 설치									19. 9.15. 완료예정
	소 방										계약						화재수신기 설치									19. 9. 15. 완료예정

나. 공정현황 및 완료예정일 (공정율: 2019년 6월 말 기준)

공 종	공정율	계약기간	완료 예정일	공 종	공정율	계약기간	완료 예정일
궤 도	40%	‛19. 1.24. ~ 8. 8.	‛19. 8.19.	건 축	64.7%	‛19. 2.11. ~ 9.18.	‛19. 9.15.
신 호	64.4%	‛18. 7.25. ~ ‛19.11.17.	‛19. 9.15.	통 신	25%	‛19. 2.13. ~ 12. 9.	‛19. 9.15.
전 기	53%	‛19. 1.25. ~ 10.21.	‛19. 9.15.	승강설비	50%	‛19. 2.20. ~ 9.17.	‛19. 9.10.
차 량	35%	‛19. 5.22. ~ 9.29.	‛19. 9.15.	기 계	5%	‛19. 4.15. ~ 9.13.	‛19. 9.15.
토 목	95%	‛18.11. 5. ~ ‛19. 7. 2.	‛19. 6.30.	PSD	5%	‛19. 5.28. ~ 12.24.	‛19. 9.15.

6		시행 계획

소요기간 : 총 123일 (국토교통부, 한국교통안전공단 검토기간 포함)

공종별 시 험 (19년 8월)	□	사 전 점 검 (19년 8월)	□	종합시험운행 (19년 9월~11월)
				시설물검증시험 (19년 9월~10월)	□	영업시운전 (19년 10월~11월)

□ 사전점검: 2019. 8. 1. ~ 18. (17일)

□ 시설물 검증시험: 2019. 9.15 ~ 29.(시험기간: 총 7일, 휴일포함)

□ 영업시운전: 2019.10.13. ~ 27.(시험기간: 총 7일, 휴일포함)

□ 종합시험운행 종료: 2019. 12. 2. (예정)

※ 개선․시정명령 및 권고사항에 대한 조치기간이 미포함된 일정 임

가. 사전점검 (1단계)

1) 사전점검 개요

점검 기간	점검 구간	점검 인력	점검항목
‛19. 8. 1. ~ 18.	신내역(환승설비)	18명	10개 공종 126항목(붙임2)

2) 추진조직: 종합시험관리팀 및 각 건설부서 감독자

업무체계 및 일정관리: 종합시험관리팀 부장 김기수 등 2명

각 건설부서 감독자: 차량정비처 과장 황봉득 등 15명

3) 추진계획 (‛19년 7월)

공종별 시험결과 검토, 종합시험운행 가능여부 확인

사전점검시 공종별 시험결과 보고서→ 종합시험관리팀에 제출

종합시험운행 전까지 철도시설의 완공가능 여부 등 점검

점검표 및 시험절차서 작성		사전점검 계획수립		사전점검 계획 보고 및 부서 통보		사전점검 시작회의
각 건설 부서		종합시험관리팀장		종합시험관리팀장		종합시험관리팀장

	사전점검 시행		점검결과 제출 및 종료회의		기술기준 검토 및 통보		종합시험운행 준비
	각 건설부서		종합시험관리팀장		국토교통부 및 한국교통안전공단		종합시험관리팀장

나. 시설물 검증시험 (2단계)

1) 시험 개요

시험 기간	점검 구간	점검 인력	점검 항목
‛19. 9.22. ~ 29.	신내역(환승설비)	19명	4개 공종 76항목(붙임3)

2) 추진 조직: 시설물 검증시험팀장 등 19명

				시설물 검증시험팀					19명
				팀장: 토목처장
												안전관리팀			1명
												보건환경처 과장 문명진
건 설					11명			운 영							7명
• 차량운영처 차장 엄상섭 • 차량정비처 과장 황봉득 • 토목처 과장 백인혁 • 승강장안전문관리단 차장 박경웅 • 전기2사업소 과장 조승희 과장 이해리 주임 유대경 • 궤도2사업소 차장 윤영선 과장 정우석 • 신호2사업소 차장 유전상 차장 남주성								• 승무시스템처 차장 신한철 • 제2종합관제센터 부장 박래균 • 신내차량사업소 과장 황정택 • 신내승무사업소 차장 김재영 • 신내기술센터 소장(전기) 서수원 소장(토목) 김태원 소장(신호) 양동식

3) 추진내용 및 계획 (‛19년 9월)

시운전 열차를 운행하여 시험항목별 시험절차서에 따라 시설물과 차량간의 운행 적합성, 시설물 기능/성능 등을 확인

시운전 열차는 시험항목에 따라 투입하고 단계별 증속운행 시험 후 영업속도로 운행하여 시험 운행

계획 수립		시작회의		시설물 검증시험 시행		점검결과 제출 및 종료회의
시설물검증 시험팀장		시설물 검증 시험팀장		시설물 검증시험팀		시설물검증시험팀장 종합시험관리팀장

	시험 결과보고		검토결과 통보		개선 시정		영업시운전 준비
	시설물 검증 시험팀장		국교부 및 교통안전공단		시설물 검증 시험팀장		시설물검증시험팀장 영업시운전팀장

다. 영업시운전 (3단계)

1) 시험 개요

시험 기간	점검 구간	참여 인력	점검 항목
‛19.10.20. ~ 27.	신내역(환승설비)	15명	2개 부분 50개항목

2) 추진 조직: 영업시운전팀장 등 15명

				영업시운전팀					15명
				팀장: 승무시스템처장
												안전관리팀			1명
												보건환경처 과장 문명진
건 설					6명			운 영							7명
• 승강기관리단 차장 서학원 • 통신2사업소 과장 김학필 • 기계2사업소 부장 성상호 주임 이만진 • 토목2사업소 과장 권순섭 • 건축2사업소 과장 조경원								• 고객안전처 부장 오진석 • 승무시스템처 대리 성지후 • 신내승무사업소 차장 한대희 차장 김진식 차장 손병갑

3) 추진내용 및 계획 (‛19년10월)

[운전분야]

운전시간, 정차 출발시각 등 열차운행스케쥴의 적정성 확인

승강장 운전설비의 적정성 확인 및 운전취급자의 업무숙달

사고발생 처리, 열차화재시 여객 대피방안 등 이례상황 대처능력 확인 및 기관사 등 노선숙지 훈련 등

[영업분야]

여객 접근로 및 동선의 적정성 점검

열차정보 안내시스템, 승객편의시설 및 안전설비 등의 적정성 점검 및 이례상황 발생시 비상대응 훈련 실시 등

계획 수립		시작회의		영업시운전 시행		종료회의 및 시험 결과보고
영업시운전 팀장		영업시운전 팀장		영업시운전팀		영업시운전팀장 종합시험관리팀장

	검토결과 통보		개선 시정		개선시정 조치 및 영업시험운행결과 제출
	국교부 및 교통안전공단		영업시운전 팀장		영업시운전팀장

라. 종합시험운행 완료

1) 판정기준(한국교통안전공단 및 국토교통부)

적 합	부 적 합	보 완
시험기준에 적합	시험기준에 부적합	경미사항으로 영업개시 이전 보완 가능한 경우

2) 부적합 사항 등의 처리

부적합 사항: 조치결과를 검토 후 재시험 가능여부를 각 팀에서 협의하여 조치계획 수립

보완사항: 조치결과를 종합시험관리팀에서 확인

부적합 발생		보고서 제출		검토 및 개선조치		종결 및 결과보고
한국교통안전공단		해당 팀		종합시험관리팀 해당 팀		종합시험관리팀

3) 완료 및 안전관리체계 변경절차

종합결과보고서 작성		종합시험운행결과 제출		자문회의 및 결과 통보		종결 및 결과보고
각 팀		종합시험관리팀 안전계획처		국교부 및 교통안전공단		종합시험관리팀

안전관리체계 사전문의		사전협의		변경승인 신청서 제출		변경승인
해당부서		안전계획처		안전계획처		국토교통부
※ 선(先) 시행		※ 신청예정일 20일 전		※ 새로운 철도노선: 운행개시 90일 전 ※ 새로운 역 시설: 운행개시 30일 전

마. 교육훈련 계획

1) 교육 방법: 이론교육(집합 및 전파) 및 실기교육(현장교육)

2) 교육 시기: 사전점검 시작 전 시행 및 완료

3) 교육 대상: 종합시험운행 참가자 및 운영부서(역무,차량,승무,기술 등)

4) 교육 내용

열차운행 및 안전 관련규정 및 선로도표, 열차운행 관련 주의사항 등

입출고 및 신내역 운행 열차 운전취급, 기관사 운행방법 등

분야별 시스템 구성, 성능, 점검방법 및 유지보수(응급조치 포함) 절차 등

7		열차 운영 계획

가. 열차운영기간: 2019. 9.15. ~ 22. / 2019.10.13. ~ 20.

※ 수립단계에서 시험항목, 시험결과 등에 따라 운행횟수/구간/시간 변경 가능

나. 주관팀 및 협조부서

주 관 팀	협조 부서
영업시운전팀 (승무시스템처)	차량분야: 차량계획처/차량운영처/차량정비처 승무분야: 승무계획처/승무운영처/제2종합관제센터

다. 열차 운행 경로도

라. 열차 운행(투입) 내용

개통(연장)구간	운행 횟수(일)	비 고
응암 ~ 봉화산	238	운전모드: 자동,수동 출입문모드: 자/자, 자/수 수/수
응암 ~ 신내역(환승설비)	112

마. 열차운행계획 및 운행시나리오

구 분	운행시간	운행간격	운행횟수	투입열차수	비 고
시설물검증시험	10:00~18:00	-	12회	2편성	야간 2회
영업시운전	10:00~18:00	15분	41회	2편성

운행구간	열차 운행시나리오	비 고
신내역(환승설비) ~신내차량기지	입고선 → 1A 외방(하선) → 신내역승강장
	신내역승강장 → 출고선 → 검수고(유치선) 입고
봉화산 ~신내역(환승설비)	입고선 → 1A 외방(하선) → 신내역승강장
	신내역승강장 → 출고선 → 봉화산 상선홈
	봉화산 상선홈 → 화랑대 상선홈 → 화랑대 하선홈
	→ 봉화산 하선홈 → 신내역승강장

8		안전관리 계획

가. 기본 추진방향

1) 시설물검증시험 및 영업시운전별 안전관리계획 별도 수립 시행

시설물 검증시험: 건설분야 관련 안전관리 책임자, 안전관리팀 및 시설물검증팀간 협의체 구성 후 추진

영업시운전: 건설분야 관련 안전관리 책임자, 안전관리팀 및 영업시운전팀 간 협의체 구성 후 추진

2) 안전관리 활동 및 절차, 비상대응계획 수립 및 시행

3) 분야별 안전관리활동계획 수립 및 시행

나. 중점관리 사항

1) 종합시험운행 참여자의 역할과 책임 부여 (철도운행안전관리자 포함)

2) 종합시험운행 참여자의 안전교육 시행

3) 열차 및 건설시설물에 대한 안전 확보

4) 유사시에 대비한 비상복구체제 수립 및 단기간 대처

5) 시험열차 운행시 지장을 주는 선로작업 관리(승인 및 통제)

다. 안전관리 조직

			안전관리팀					1명
			보건환경처 과장 문명진
시설물검증시험팀				19명			영업시운전팀							15명
시설물검증팀장 처장 국윤모 등 19명							영업시운전팀장 처장 안창규 등 15명

라. 안전관리팀(각 시험팀 협조) 임무

1) 안전관리업무의 지휘, 통제 및 감독

2) 「산업안전보건법」 및 「건설기술진흥법」 등 관련 법령에서 정한 안전조치사항의 점검․확인

3) 사고방지대책 수립ㆍ시행

4) 시험구간 운전취급 절차 및 시험열차의 운행선로 안전 확인과 시험요원 탑승관리

5) 시험구간의 급/단전 절차수립 및 선로작업 및 출입통제

6) 시험 참여자에 대한 안전교육

7) 고장ㆍ사고 등 비상상황에 대한 대응 시행

마. 사고복구 및 안전사고 보고 체계

□ 붙 임 :	1. 종합시험운행 시행절차 및 일정 1부
	2. 사전점검 점검항목 1부
	3. 도시철도 시설물검증시험 점검항목 1부
	4. 영업시운전 점검항목 1부
	5. 각종 서식류 1부. 끝.

붙 임		1. 종합시험운행 시행절차 및 일정

구 분				시행일정 및 추진내용
사전준비		사전 협의		2019. 6월 : 종합시험운행 기본계획 수립 및 사전협의 자료 제출
		□		※ 시행 3개월 전 시행: 2019. 6.26.일 시행(공단 사정에 따라 해당일 시행)
		사전점검계획 수립		2019. 7월 : 분야별 사전점검계획 수립 사전점검팀 구성
		□
		사전 점검		2019. 8월 : 사전점검팀 합동 점검 시행 시설물 상태 및 공종별 시험결과 확인 종합시험운행 가능여부 확인 [사전점검 완료예정일: 2019. 8.18.]
		□		결과검토: 사전점검결과 및 종합시험운행 시행계획 검토 철도시설의 기술기준 적합여부 검토 (국토교통부 및 한국교통안전공단)
		종합시험운행 시행계획 수립		2019. 9월 : 종합시험운행 시행계획 수립 공종별 시험 및 사전점검 결과보고 시험항목, 절차, 상세일정 및 종합시험팀 구성 안전관리계획, 영업운영계획 등 수립 ※ 시행 3주전 종합시험운행 기본계획 수립
		□
종합시험운행		시설물 검증 시험		2019. 9월~10월 : 허용 최고속도까지 열차 증속 운행 철도시설물의 안전상태, 차량운행 적합성 철도시설물과의 연계성(Interface) 철도시설물의 정상동작 여부 등 확인․점검 [시설물 검증시험 예정일: 2019. 9.22] ※ 전기 사용전검사 확인증, 소방시설 완공검사 증명서를 검증시험 계획서에 첨부
		□		결과검토: 시설물 검증시험 시행결과 검토 철도시설 및 열차운행체계 안전성 여부 검토(개선․시정 및 권고 사항조치) (국토교통부 및 한국교통안전공단)
		영업시운전		2019. 10월~11월 : 시설물 검증시험 완료 후 영업개시 대비 열차 운행체계 검증 및 영업설비 점검 시설물에 대한 종합적인 연계성, 안전성 종사자 업무숙달 등 점검 [영업시운전 완료예정일: 2019.10.27.] ※ 승강기시설 완성검사 합격증명서 시운전계획서에 첨부
		□		결과검토: 영업시운전 시행결과 검토 정상운행 준비의 적절성 여부 검토(국토교통부 및 한국교통안전공단)
영업개시				2019. 12월 : 종합개통 및 영업개시 [예정일: 2019.12. 3.]

붙 임		2. 사전점검 점검항목

□ 시행기준 : 철도종합시험운행 시행지침 제13조, 23조 및 별표2, 4

시험 항목		시험 내용	비 고
가. 선로시설		○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 궤도 성능시험	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
나. 전철전력설비		○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 전차선로 집전성능평가시험 ○ 전철변전소 특성시험 ○ 레일전위측정시험
다. 신호 및 열차제어 설비		○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 지상제어장치시험 ○ 지상신호 및 열차제어설비시험 ○ 지상·차상 신호 및 열차제어설비 연계동작시험
라. 관제설비
시험 항목	시험 내용		비 고
TTC관제설비	○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 운전관제장치 설치시험 ○ 신호컴퓨터실 장치 설치시험 ○ 통신망 장치 설치시험 ○ 전원장치 인가 시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항		점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
관제실과 현장 연동장치간 Interface	○ 운전관제 설비분야 - 시스템 기능 확인 - 열차운행 제어관리 기능 확인 - 스케쥴 기능 확인 - 외부 인터페이스 기능 확인 ○ 신호설비 분야 - 신호/유지보수 콘솔 기능 확인 - 운전관제실 장비 운용시험 - 시스템별 운용상태 확인 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항

시험 항목	시험 내용	비 고
시스템 기능 (S/W) 시험	○ TTC기본 S/W 기능시험 ○ 열차운행관리 S/W 기능시험 ○ 열차운전관리 DB 기능시험 ○ 업무지원 S/W 기능시험 ○ 기타 필요사항	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
시 스 템 제어시험	○ 역 모드 전환 제어 기능시험 ○ 선로전환기 전환 제어 기능시험 ○ 진로제어(신호기 제어 포함) 기능시험 ○ TTC, CTC(L/S)에서 열차운행 제어관리 ○ 기타 필요사항
스케쥴 관련 이상유무 확 인	○ 스케쥴 표시상태 확인 - 온라인 스케쥴 실행 및 변경상태 - 스케쥴 관련 인쇄상태 ○ 실적 출력상태 확인 - 열차운행실적 출력물 상태 - 각종 통계조회 및 보고서 출력상태 ○ 기타 필요사항
열차운행 제어상태 확 인	○ 궤도점유상태 확인 ○ 열차번호 이동기능 및 열차 번호 창 적정 유무 ○ Line-up 기능 확인 ○ 자동진로(Auto) 기능 확인 ○ 역 정보 등 표시상태(LDP/LS)확인 ○ 서버기능 확인 ○ 열차스케쥴 조정시험 ○ 열차위치 추적시험 ○ 기타 필요사항
종합영상 설 비	○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 콘솔 및 모니터 동작상태 ○ 영상저장 및 검색기능 시험
관제전화 설 비	○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 주장치, 운영장치, 유지보수장치 개별 동작 상태 ○ 음성저장 및 검색 가능유무

시험 항목	시험 내용	비 고
열차무선 시 스 템	○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 관제실, 역(신호취급실), 열차 간 통화상태	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
교환설비	○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 가입자간 호출, 통화상태
기 타	○ 열차운행관련 인허가 사항 ○ 지하역사CCTV,화재탐지설비연동 및 경보표출확인 ○ 기타 필요사항
SCADA설비 기능 시험	○ 설치상태 및 철도시설기술기준에 부합 여부 ○ 주컴퓨터 및 통신제어장치 기능 확인 ○ 원격전력 제어 기능 확인 ○ 외부인터페이스 데이터 전송기능 확인 ○ 운용자 및 유지보수자 콘솔기능 시험 ○ 계통반 표출기능 확인 ○ 원격제어소 장치의 자료취득 및 제어 기능 확인 ○ 단로기(차단기) 원격제어 시험 ○ 단로기(차단기) 상태에 따른 급전여부 전송시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항

마. 운전(Operation)
CODE	시험항목		세부시험항목 및 내용		비 고
OP_01	운전시간		○ 기지에서 출발역까지의 출고시간 검토 ○ 운전매뉴얼 철도차량운전자 출고 기능검사 및 시간측정 ○ 정차역 정차시간 검토 - 여객취급 정차시간 산정 ○ 역 구간별 운전시분(여객100% 승차시) ○ 종착역 도착후 반복시간 산정
OP_02	열차운영 계획 스케줄 점검		○ 연속열차 운행시 최소운행시격 ○ 열차반복 사용시 설정된 반복시간 ○ 역 도착선 도착후 출발선 전선시간 ○ 기지에서 출발역까지의 출고소요시간 ○ 영업 종료후 기지 입고시 소요시간
OP_03	철도종사자 업무숙달		○ 운전업무종사자 ○ 관제업무종사자 및 운전취급자
OP_04	이례사항 대처능력 및 운행안전		○ 운행중 비상제동 동작 및 대처방법 ○ 장애물 발생에 대한 처리요령 ○ 사상사고 발생시 처리방법 및 보고체계 ○ 사고시 단선 운전취급에 대한 대처능력 ○ 신호장애 발생시 대응능력 ○ 탈선운전 사고발생시 열차소통 방안 ○ 열차화재시 여객대피 방안 ○ 열차고장시 구원열차 및 여객유도 방안 ○ 유관기관 출동시간 및 역할분담 등 협력체계 점검		신규 철도 시스템 구축 및 신설선 건설시에 한함
바. 영업(Commercial Business)
CODE	시험항목	세부시험항목 및 내용		비 고
CO_01	여객 접근로 및 동선	○ 접근노선 장애요소 파악 및 보완 ○ 역사내 환승시설 설치 및 보완 ○ ES, MW, 엘리베이터 점검 및 혼잡도 ○ 장애인 이동로 확보여부 점검 ○ Carter 이동 여부 점검

CODE	시험항목	세부시험항목 및 내용	비 고
CO_02	여객 승강차	○ 게이트 통과후 정해진 좌석 이동시간 측정 (장애인 포함) ○ 열차 정차표지 설치 확인 및 위치조정
CO_03	출발역 열차대기 시간	○ 차내설비 점검시간 ○ 여객 승차시간
CO_04	열차정보	○ CTC와의 열차운행관련 정보 송․수신 점검 ○ 출․도착홈 안내게시기 표출 ○ 자동방송장치의 방송점검
CO_05	역무점검	○ 역무원 배치 및 교육 ○ 역무자동화시스템 운용 점검
CO_06	여객 안전설비	○ 계단, 에스컬레이터, 엘리베이터 전기설비 점검 ○ 승강장 안전상의 장애요인 점검 및 방화시설 점검
CO_07	안전 및 보안대책	○ 영업운행안전관리 계획 점검 ○ 안전 및 보안 관련 소요설비 검토 및 확보
CO_08	기타 영업서비스 준비사항점검	○ 역시설물 및 편의시설 점검 - 대합실․승강장의자 등 환경점검 - 역무시설 및 공간 점검 - 공공시설 점검

붙 임		3. 도시철도 시설물검증시험 점검항목

□ 시행기준 : 철도종합시험운행 시행지침 제13조 및 별표2

시험 항목		시험 내용	비 고
가. 선로시설		○ 궤도 성능시험	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
나. 전철전력설비		○ 전차선로 집전성능평가시험 ○ 전철변전소 특성시험 ○ 레일전위측정시험
다. 신호 및 열차제어 설비		○ 지상제어장치시험 ○ 지상신호 및 열차제어설비시험 ○ 지상·차상 신호 및 열차제어설비 연계동작시험
라. 관제설비
시험 항목	시험 내용		비 고
TTC관제설비	○ 운전관제장치 설치시험 ○ 신호컴퓨터실 장치 설치시험 ○ 통신망 장치 설치시험 ○ 전원장치 인가 시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항		점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
관제실과현장 연동장치간 Interface	○ 운전관제 설비분야 - 시스템 기능 확인 - 열차운행 제어관리 기능 확인 - 스케쥴 기능 확인 - 외부 인터페이스 기능 확인 ○ 신호설비 분야 - 신호/유지보수 콘솔 기능 확인 - 운전관제실 장비 운용시험 - 시스템별 운용상태 확인 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항

시험 항목	시험 내용	비 고
시스템 기능 (S/W) 시험	○ TTC기본 S/W 기능시험 ○ 열차운행관리 S/W 기능시험 ○ 열차운전관리 DB 기능시험 ○ 업무지원 S/W 기능시험 ○ 기타 필요사항	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
시 스 템 제어시험	○ 역 모드 전환 제어 기능시험 ○ 선로전환기 전환 제어 기능시험 ○ 진로제어(신호기 제어 포함) 기능시험 ○ TTC, CTC(L/S)에서 열차운행 제어관리 ○ 기타 필요사항
스케쥴 관련 이상유무 확 인	○ 스케쥴 표시상태 확인 - 온라인 스케쥴 실행 및 변경상태 - 스케쥴 관련 인쇄상태 ○ 실적 출력상태 확인 - 열차운행실적 출력물 상태 - 각종 통계조회 및 보고서 출력상태 ○ 기타 필요사항
열차운행 제어상태 확 인	○ 궤도점유상태 확인 ○ 열차번호 이동기능 및 열차 번호 창 적정 유무 ○ Line-up 기능 확인 ○ 자동진로(Auto) 기능 확인 ○ 역 정보 등 표시상태(LDP/LS)확인 ○ 서버기능 확인 ○ 열차스케쥴 조정시험 ○ 열차위치 추적시험 ○ 기타 필요사항
관제설비 간 인터페이스 시험	○ 열차행선안내장치 시험 ○ 전차선 급․단전 표시 시험 ○ 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험 ○ 기타 필요사항

시험 항목	시험 내용	비 고
종합영상 설 비	○ 콘솔 및 모니터 동작상태 ○ 영상저장 및 검색기능 시험	점검항목이나 시험내용은 도시철도별 시설이나 설비특성에 따라 세부적으로 다르게 적용 될 수 있음
관제전화 설 비	○ 주장치, 운영장치, 유지보수장치 개별 동작 상태 ○ 음성저장 및 검색 가능유무
열차무선 시 스 템	○ 관제실, 역(신호취급실), 열차 간 통화상태
교환설비	○ 가입자간 호출, 통화상태
기 타	○ 열차운행관련 인허가 사항 ○ 지하역사CCTV,화재탐지설비연동 및 경보표출확인 ○ 기타 필요사항
SCADA설비 기능 시험	○ 주컴퓨터 및 통신제어장치 기능 확인 ○ 원격전력 제어 기능 확인 ○ 외부인터페이스 데이터 전송기능 확인 ○ 운용자 및 유지보수자 콘솔기능 시험 ○ 계통반 표출기능 확인 ○ 원격제어소 장치의 자료취득 및 제어 기능 확인 ○ 단로기(차단기) 원격제어 시험 ○ 단로기(차단기) 상태에 따른 급전여부 전송시험 ○ 설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인시험 ○ 기타 필요사항

붙 임		4. 영업시운전 점검항목

□ 시행기준 : 철도종합시험운행 시행지침 제23조 및 별표 4

가. 운전(Operation)
CODE	시험항목		세부시험항목 및 내용		비 고
OP_01	운전시간		○ 기지에서 출발역까지의 출고시간 검토 ○ 운전매뉴얼 철도차량운전자 출고 기능검사 및 시간측정 ○ 정차역 정차시간 검토 - 여객취급 정차시간 산정 ○ 역 구간별 운전시분(여객100% 승차시) ○ 종착역 도착후 반복시간 산정
OP_02	열차운영 계획 스케줄 점검		○ 연속열차 운행시 최소운행시격 ○ 열차반복 사용시 설정된 반복시간 ○ 역 도착선 도착후 출발선 전선시간 ○ 기지에서 출발역까지의 출고소요시간 ○ 영업 종료후 기지 입고시 소요시간
OP_03	철도종사자 업무숙달		○ 운전업무종사자 ○ 관제업무종사자 및 운전취급자
OP_04	이례사항 대처능력 및 운행안전		○ 운행중 비상제동 동작 및 대처방법 ○ 장애물 발생에 대한 처리요령 ○ 사상사고 발생시 처리방법 및 보고체계 ○ 사고시 단선 운전취급에 대한 대처능력 ○ 신호장애 발생시 대응능력 ○ 탈선운전 사고발생시 열차소통 방안 ○ 열차화재시 여객대피 방안 ○ 열차고장시 구원열차 및 여객유도 방안 ○ 유관기관 출동시간 및 역할분담 등 협력체계 점검		신규 철도 시스템 구축 및 신설선 건설시에 한함
나. 영업(Commercial Business)
CODE	시험항목	세부시험항목 및 내용		비 고
CO_01	여객 접근로 및 동선	○ 접근노선 장애요소 파악 및 보완 ○ 역사내 환승시설 설치 및 보완 ○ ES, MW, 엘리베이터 점검 및 혼잡도 ○ 장애인 이동로 확보여부 점검 ○ Carter 이동 여부 점검

CODE	시험항목	세부시험항목 및 내용	비 고
CO_02	여객 승강차	○ 게이트 통과후 정해진 좌석 이동시간 측정 (장애인 포함) ○ 열차 정차표지 설치 확인 및 위치조정
CO_03	출발역 열차대기 시간	○ 차내설비 점검시간 ○ 여객 승차시간
CO_04	열차정보	○ CTC와의 열차운행관련 정보 송․수신 점검 ○ 출․도착홈 안내게시기 표출 ○ 자동방송장치의 방송점검
CO_05	역무점검	○ 역무원 배치 및 교육 ○ 역무자동화시스템 운용 점검
CO_06	여객 안전설비	○ 계단, 에스컬레이터, 엘리베이터 전기설비 점검 ○ 승강장 안전상의 장애요인 점검 및 방화시설 점검
CO_07	안전 및 보안대책	○ 영업운행안전관리 계획 점검 ○ 안전 및 보안 관련 소요설비 검토 및 확보
CO_08	기타 영업서비스 준비사항점검	○ 역시설물 및 편의시설 점검 - 대합실․승강장의자 등 환경점검 - 역무시설 및 공간 점검 - 공공시설 점검

붙 임		5. 각종 서식류

□ 시설물검증시험 절차서 및 점검표

시설물검증시험 절차서 및 점검표

【분야명 】분야 (점검항목명)

1. 목적 및 범위

2. 정의 및 약어

3. 시험조건

4. 합격 판정기준

5. 사전조치 사항

6. 사용 계측기 및 기록장비

7. 시험인력 및 투입장비

8. 시험절차

가. 시험항목

나. 시험방법

9. 시험기준

10. 시험결과 기록부

시험일시			날씨:						시험책임자				(인)
시험구간						시험열차(편성번호)
시험항목 (관리코드)		판 정 기 준								시험 결과						비고
										적 합		부적합		보 완
종합 의견
점검자(건설분야)							점검자(운영부서)
소속	직위			성명	서명		소속	직위			성명				서명

□ 시설물검증시험 항목별 결과 보고서

시설물검증시험 항목별 결과 보고서

시 행 일		점검분야
점검항목		점검구간
점 검 자	(인)
점검장비
점검내용
점검결과 및 조치사항
특이사항
종합의견

□ 영업시운전 실적 보고서

영업시운전 실적 보고서

운행일시
열차운행	편성번호		운행시간		운행거리[km]	누적 운행거리[km]
			: ~ :
			: ~ :
			: ~ :
			: ~ :
			: ~ :
			: ~ :
			: ~ :
			: ~ :
작업현황	분 야	담당자		작업내용
특이사항	분 야	발생시간		내 용			비 고
보고내용

□ 영업시운전 고장, 장애기록 관리부

영업시운전 고장, 장애기록 관리부

연 번	일 자	분 야	열차 지연내용			해당 열차		장애내용	조치내용	개선내용
			시작시간	종료시간	지연시간	편성번호	열차번호			개선완료일	주관부서

□ 종합시험운행 일일 점검표

종합시험운행 일일점검표
(제10조제7항 및 제20조제7항 관련)

1. 시험일시 :

2. 시험분야 :

3. 시험항목 :

4. 시험구간 :

5. 시험열차 :

6. 시험방법 및 내용 :

7. 시험결과

가. 판정기준 :

나. 시험결과 :

다. 적합/부적합 여부(판정사유 포함) :

라. 기타 특이사항(장애 및 시험실패 등) :

8. 점검자

건설분야 :				운영부서:
소속	직위	성명	서명	소속	직위	성명	서명

□ 종합시험운행 결과보고서

종합시험운행 결과보고서
(제14조제1항 및 제24조제1항 관련)

1. 개요

선로의 주요특성, 일반적인 시험개요(구간, 시험일정) 등을 설명 및 서술한다.

2. 적용범위

종합시험운행의 전반적인 적용범위를 기술한다.

3. 시험내용(분야별/점검항목별)

가. 목적

나. 적용범위 및 시험대상

다. 관련사양 및 규격

라. 용어설명

마. 시험항목

바. 측정장비

사. 시험개소

아. 시험 소요인력 및 일수

자. 시험절차

(1) 시험조건

(2) 사전조치

(3) 시험방법(측정위치, 센서부착 방법 등)

(4) 평가기준

(5) 시험결과의 기록 및 저장

차. 시설물검증시험 및 영업시운전 과정에서 발생한 고장·장애 현황

(1) 고장·장애 발생현황 및 통계분석

(2) 고장·장애별 원인분석 및 조치결과

카. 시험결과

타. 참고문헌 및 기준

□ 개선․시정명령 및 권고사항 조치계획서 및 부적합 사항 보고서

개선․시정명령 및 권고사항 조치계획서

【       】분야

□ 사전점검  ■ 시설물검증시험  □ 영업시운전 ( ■ 개선 , □ 시정, □ 권고사항)

점검분야 관리코드	조치사항 상세내역			조치 계획
	구간 위치	지적 내용	발생 원인	조치부서	담당자	조 치 예정일

※ 주 1) 관리코드는 해당(사전점검, 시설물검증, 영업시운전) 점검표의 관리코드 기입

2) 발생원인 : 시공불량, 설계오류, 추가요구, 신설, 기준부합, 장애, 청소(정리)

부적합 사항 보고서

【       】분야

□ 사전점검  ■ 시설물검증시험  □ 영업시운전 ( ■ 개선 , □ 시정, □ 권고사항)

분야(관리코드)
제 목
세부내용
개선사항
개선계획
개선결과
작성자			개선완료일		확인자

끝.