문서번호	도시철도토목부-8126
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	궤도과장	도시철도토목부장		도시철도국장
김근수	최진규	정대현		08/06 이진용
협 조
	도시철도사업부장		최병훈
	주무관		최경호

『신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사』

건설사업관리용역 발주계획

2019. 8.

도시기반시설본부

(도시철도 토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	∎
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	∎
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	∎
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	∎
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	∎
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	∎
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	∎
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	∎	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	∎	□

『신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사』

건설사업관리용역 발주계획 검토

『신림선 경전철 민간투자사업 건설공사』의 궤도분야 감독권한 등 건설사업관리용역 발주계획을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 궤도공사 감독권한 등

건설사업관리용역

○ 위    치 : 영등포구 여의도동~관악구 신림동(L=7.76km)

○ 규    모 : 주행로 16.7km(단선기준), 분기기 부설 18틀

○ 궤도구조 : 고무차륜 주행로(Con’c포장), 안내레일(체결구+지지대)

○ 용역기간 : ‘19.10월~’22.1월(28개월) ※총사업기간: ‘17.2~’22.2

○ 용 역 비 : 1,290백만원(궤도 공사비: 12,758백만원)

○ 예산과목 : 신교통수단도입, 경전철건설사업, 신림선 경전철건설,

시설비 및 부대비, 감리비(도시철도 특별회계)

Ⅱ		추 진 현 황

○ ‘15. 8. : 신림선 경전철 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘17. 5. : 토목분야 공사착공(공정율: 41.82%  ’19.7월말 현재)

○ 총사업비 현황                     (2007.7.1. 불변가격 기준, 단위:억원)

구 분	총사업비	민간사업비	건설 보조금
			국비	시 비
사 업 비	5,872	2,867	717	2,288
( 비 율 )	(100%)	(48.82%)	(12.21%)	(38.97%)

※총사업비(5,872억원) : 공사비 4,677, 감리비188, 부대비200, 운영설비비 446

조사설계비 198, 영업준비금 등 163

Ⅲ		발 주 계 획

□ 발주방법

○ 감리공구 : 1개공구 시행(토목1~3공구)

○ 시행방안 : 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 시행

(건설기술진흥법 제39조 2항 근거)

○ 소요예산 : 총차1,290백만원(1차계약:180백만원)

○ 용역기간 : ‘19.10월 ~ ’22.1월

○ 착수시기 : ‘19. 10월(궤도공사 ’19.11월 착공예정)

○ 계약방법 : 총액입찰, 장기계속공사, 입찰참가자젹사전심사(PQ)

○ 입찰 참가자격

- 실적제한으로 입찰공고일 기준 최근10년 이내 건설사업관리용역 실적이 궤도공사 연장 5.5km 이상

- 5개 업체 이내 범위에서 구성원별 계약참여 최소지분율은 5% 이상으로 공동수급체 구성 가능

※실적제한 : 공동수급체의 구성일원 중「감독 권한대행 등 건설사업관리용역」   실적이 10년 이내 준공된 궤도공사(콘크리트도상) 단선 연장 L= 5.5㎞   (계약연장 16.7km의  1/3 이내) 이상인 업체

○ 입찰참가자격 사전심사(PQ) 선정

- 사업수행능력평가 점수가 90점 이상인자

- 수행실적평가서 제출업체가 15인 미만인 경우에는 수행실적 평가  점수가 60점 이상인 모든 업체에게 입찰참가자격 부여

- 수행실적평가 점수가 90점 이상인 자가 15인 미만인 경우에도 수행실적 평가점수가 60점 이상인 자 중 득점순으로 15위까지 입찰참가자격 부여

○ 낙찰자 결정

- 최저가 입찰자 순서대로 심사한 결과 종합평점 90점 이상인 자

용역수행능력(64점) + 책임기술인 경력평가(1점) + 지역업체참여(3점) + 경영상태(2점) + 입찰가격(30점)【 + 기술인력보유상황(-10점) + 계약질서준수(-1점)】

※책임기술인 경력평가 및 경영상태 평가는 참여업체 모두 배점한도 부여

□ 사업수행능력 평가계획

○ 건설사업관리기술단 구성 : 6명(상주4명, 비상주 2명)

- 책임기술인(고급1명), 분야별 기술인(중급2명, 초급1명)

기술지원 기술인(특급1명, 고급1명)

○ 사업수행능력 평가

▷ 평가대상 기술인 : 총5명

- 책임건설사업관리기술인(고급) 1명, 건설사업관리기술인(중급) 2명,

기술지원 기술인(특급1, 고급1) 2명

- 평가항목 : 등급, 해당분야 경력, 직무분야 실적, 교육훈련, 면접

▷ 경력 및 실적 평가 인정범위

① 다음 해당분야(동일, 유사) 경력에 대하여 평가.

동일분야	유사분야	기타분야
토목직무 중 도시철도(경량전철 포함)의 궤도공사	토목직무 중 고속철도 및 일반철도의 궤도공사	동일분야 및 유사분야를 제외한 토목직무

※ 궤도공사 : 철도궤도(도시철도,고속철도,일반철도), 궤도시설공사, 도상교환공사,

레일․침목․도상 교환공사 및 선로유지관리 공사 등을 말한다.

② 사업수행능력 평가

공 종	기술인 경력 실적	점 수
소 계		100점
참여기술인	- 책임건설사업관리기술인	20
	- 분야별 및 기술지원기술인	33
	- 면접점수(책임기술인5점,분야별2점)	7
유사용역수행 실적(회사실적)	- 최근3년간 건설사업관리용역의 건설공사와 같거나 유사한 공종의 용역사업	10
신 용 도	- 입찰참가제한 업무정지, 부실벌점, 재정상태 건실도 등	15
기술개발 및 투자실적	- 개발·활용실적(3), 투자실적(7)	10
교체빈도	- 용역업자 및 참여기술인	5

③ 참여기술자 해당분야 경력

공 종	인 정 범 위	인정율
궤 도	- 동일분야, 유사분야	100%
	- 기타분야	60%

④ 회사 유사용역수행실적

공 종	인 정 범 위	인정율
궤 도	- 동일분야, 유사분야	100%
	- 기타분야	60%

⑤ 책임건설사업관리기술인 및 기술지원기술인의 기술자격 가점

구분	기 술 사	기 사	산업기사
궤 도	철 도	철도토목	철도토목
점 수	0.5	0.3	0.1

Ⅳ		향후 추진계획

○ ‘19.  8. : 건설사업관리용역 계약의뢰, 입찰공고

○ ‘19.  8. : 사업수행능력평가서 접수 및 평가

○ ‘19.  9. : 낙찰자 결정

○ ‘19. 10. : 계약체결 및 용역착수

붙임 1. 위치도 1부.

2. 건설사업관리용역 설계서 1부.

3. 사업수행능력 평가 및 작성기준(안) 1부.

4. 건설사업관리용역 과업내용서(안) 1부.  끝.