공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사(강남구 2권역)

2. 위    치 : 강남구 일대(테헤란로 남측)

3. 공사목적

◦ 주민 안전사고 발생 위험을 초래하고 있는 도로함몰 예방을 위해 시행한 노후 하수관로 종합실태조사 결과에 따라 동공 발생이 우려되는 노후 하수관을 정비함으로써 주민 안전사고 예방 및 안전도시 건설에 기여

4. 공사개요

총차분	1차분
전체교체 D300~600㎜, L=997m	전체교체 D450~600㎜, L=408m
부분교체 D450~1,000㎜, N=32개소	부분교체 D450㎜, N=4개소

5. 총사업비

◦ 총      차 : 금 2,390,340,000원

(도급비 1,607,440천원, 관급비 300,670천원, 이전비 482,230천원)

◦ 2019년(1차) : 금 1,000,000,000원

(도급비 729,900천원, 관급비 117,990천원, 이전비 152,110천원)

6. 공사기간

◦ 총      차 : 착공일로부터 ~ 2020.12.31.

◦ 2019년(1차) : 착공일로부터 ~ 2019.12.31

7. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

8. 국민건강, 국민연금, 산업안전관리, 퇴직공제부금

1) 사용하지 않은 상기 제경비는 준공시 정산처리 한다.

9. 사  토  장 : 수도권 김포 매립지를 원칙으로 한다.

10. 기타사항 : 본 공사의 설계물량은 현장 여건 및 공사 진행 상황에 따라 증ㆍ감 될수 있다.

11. 기타 유의사항

◦ 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문 기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공 시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행 시 이수증을 소지 하여야 한다.

◦ 단, 교육기관 일정 등으로 착공 전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 4개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.

◦ 폐기물관리 : 공사 시행시 발생하는 폐기물의 상차 운반의 투명성을 확보하기 위한 근거자료(일자,차량번호,물량,사진 등)를 작성 비치하여야 함

◦ 발생토사관리 : 현장에서 발생하는 양질의 토사는 서울시 사이버 흙은행(Http://soilbank.seoul.go.kr)시스템에 등록하여 상호 이용이 가능하도록 조치하여야 함

11. 예정공정표

일 정 공 종	8월		9월	10월	11월	12월	비고
토 공
구조물공
포 장 공
부 대 공