문서번호	시설보수과-4670
결재일자	2019.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이승환		08/21 김준섭
협조
	주무관		고흥일

신사고가 보수공사 설계변경(정산) 보고

2019. 8.

남부도로사업소

시설보수과

신사고가 보수공사 설계변경(정산) 보고

우리사업소에서 시행 중인「신사고가 보수공사」관련 감독업무 수행 중인 서울시설공단 설계변경(정산)보고에 따른 검토 보고 임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 신사고가 보수공사

○ 공사기간 : 2019. 3. 29. ~ 2019. 8. 25.

○ 도 급 비 : 176,541,000원

○ 공사개요 : 신축이음보수 43.3m, 교면포장 1.5a, 표면보수 110㎡ 등

○ 도 급 자 : (유)피아이건설 대표 조영수

○ 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독1처 임상선)

□ 설계변경(정산) 내용보고(서울시설공단)

【관련공문 : 서울시설공단 공사감독1처-5044(2019.8.21.)호】

○ 설계변경 사유

- 공사 실정보고에 따른 변경

· 아스팔트 포장 및 상판보수 물량정산

[관련공문 : 실정보고 검토보고, 시설보수과-3504(19.6.26.)]

· 유공관 및 줄눈 반영

[관련공문 : 실정보고 검토보고, 시설보수과-3504(19.6.26.)]

· 아스팔트 시험절삭비용 반영

[관련공문 : 실정보고 검토보고, 시설보수과-3504(19.6.26.)]

- 작업지시에 따른 변경

· 콘크리트 표면보수 변경 및 단면보수 반영

[관련공문 : 검검사항 조치계획 보고, 시설보수과-4261(19.7.29.)]
- 중기운반 : 일괄 경비 적용(재료비, 노무비, 경비 → 경비)

[관련공문 : 건설공사 예정가격 산정 관련 자료제출 요청, 안전감사담당관-11841(19.8.13.)]

- 신축이음장치보수 및 부대공 등 각 공종 실정산 수량 적용

- 제경비 실제 납부금액 반영

· 건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금비 등 실 납부금액 정산

[제비율 검증 프로그램 확인(계약금액조정 검증확인서)]

○ 주요공종 수량 변경(증,감) 현황

공 종	단위	수 량		증·감
		당 초	변 경
신축이음장치보수	m	43.3	44.1	증) 0.8
콘크리트 표면보수	㎡	110.0	34.2	감) 75.8
교량상판보수	㎡	60.0	25.4	감) 34.6
포장 및 교면방수	㎡	150.0	150.0	-
콘크리트 단면보수	㎡	-	17.0	증) 17.0

○ 공사비 변경사항(증,감)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 공 사 비		194,171,000	160,155,000	감) 34,016,000
도급비	공급가액	160,491,819	127,288,182	감) 33,203,637
	부가가치세	16,049,181	12,728,818	감) 3,320,363
	계	176,541,000	140,017,000	감) 36,524,000
관급자재비		15,633,000	18,056,000	증) 2,423,000
폐기물처리비		1,997,000	2,082,000	증) 85,000

□ 조치 의견

○ 설계변경(정산) 내용이 공사추진 중 실정보고, 실제 시공물량 정산, 중기운반 일괄경비 적용(감 200천원) 및 건강보험료, 연금보험료 등 제경비 실정산에 따른 정산 설계변경으로,

○ 상기와 같이 설계변경 후 재계약(관리단속과 의뢰)하여 시설물 보수공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계변경(정산) 공문 1부.

2. 설계변경도서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.  끝.