설계변경(1차) 심의 소위원회
○ 일시 : 2019년 08월 27일(화) 16:00 ○ 장소 : 전자결재 서면 심의 ○ 안건 : 2019년 서강동외 7개동 상수도 공사 설계변경(1차) 심의 ○ 설계변경사유 : 공사시행에 따른 물량증감 및 신규공종 발생 ○ 심의 결과
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위 원 장	급수운영과장	이병운	08/27 代김찬모	적정함
위 원	급수설비팀장	김찬모	김찬모	적정함
위 원	주무관	신동철	신동철	적정함
위 원	주무관	김승완	김승완	적정함
간 사	주무관	김승진	김승진

2019. 08. 26.

서부수도사업소 심의위원회

공사 설계변경(1차) 심의 설명서

공사명	2019년 서강동외 7개동 상수도공사 (장기계속단가계약)

부 서 명	서부수도사업소(급수운영과)
작 성 자	김 승 진
제출년월일	2019. 08. 27.

설 계 변 경(1차)  심 의 설 명 서

□ 공사 현황

□ 공 사 명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : 당초 - D=13~300㎜, L=2,160m

변경 - D=13~300㎜, L=2,160m

□ 공사기간 : 2019.06.10. ~ 2020.06.30.

□ 계약금액 : 655,976,530원

□ 도 급 자 : ㈜화랑건설 대표 박순임

□ 설계변경 사유

□ 신규공종 발생 및 시공에 따른 물량증감

- 신규 공종 : 대형 계량기 설치공(150mm)외 18개 공종

- 물량 증감 : 아스팔트 포장절단(200mm)외 57개 공종

□ 주요 공종 세부 변경 내역 : 따로붙임(설계변경 내역서)

□ 설계변경 금액 내역                                                    (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		1,085,476,530	1,085,476,530	변동없음
도급비	1차수(2019년)	432,249,000	432,249,000	-
	총차	655,976,530	655,976,530	-	총부기금액 변동없음
관급자재비		185,900,000	185,900,000	-
도로복구비 및 기타		243,600,000	243,600,000	-

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.