문서번호	도로보수과-6435
결재일자	2019.9.6.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이석연	송광석	양기승		09/06 송만규
협 조

설계변경 및 정산(제2회) 계획 보고

『2019년 포장도로 불량맨홀 정비공사』

2019.  9.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경 및 정산(제2회)계획 보고

『2019년 포장도로 불량맨홀 정비공사』

우리사업소에서 시행중인 『2019년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』와 관련하여 신규공종 발생 및 시공물량 증․감 등에 따른 제2회 설계변경 및 정산 계획을 보고드림

1		공사 개요

공 사 명 : 2019년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

공사기간 : 2019. 3. 20. ~ 2019. 12. 20.

공사개요 : 불량맨홀 정비 741개소

공 사 비 : ************(도급비)

도 급 자 : ************

2		설계변경사유 및 내용

설계변경 사유

○ 신규공종 발생

- 매몰된 맨홀 인상에 따른 추가 인상(높이 25cm~35cm)

- 맨홀정비 시 주변 포장면의 포트홀, 망상균열 등 정비가 필요한 주변포장면 정비공(폭 5cm~20cm)

○ 신규공종 설계반영에 따른 기 계약공종 물량조정(증·감) 시행

주요 물량변경 내용

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
기본포장면 정비	개소	741	727	감 14
맨홀 추가 인상	개소	-	3	증 3	신규
주변포장면 정비(5㎝)	개소	-	4	증 4	신규
주변포장면 정비(10㎝)	개소	-	3	증 3	신규
주변포장면 정비(15㎝)	개소	-	2	증 2	신규
주변포장면 정비(20㎝)	개소	-	2	증 2	신규
계	개소	741	741	증 0

공사비 변경 내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총 공 사 비		************	************	****
도급비	공급가액	************	************	****
	부가가치세	***********	***********	****
	계	************	************	****

3		정산(제2회) 시행

정산내용 : 제4차 작업지시분에 대해 정산처리(기성)

주요내용 : 불량맨홀 정비 169개소

○ 2019년 정기점검시 도출된 불량맨홀 정비 132개소

○ 도로 순찰 및 기관요청에 위한 불량맨홀 정비 37개소

○ 맨홀종류별 불량맨홀 정비 현황

구분	계	하수	상수	통신	전기	가스	소화전	난방	기타
전회누계	316	74	102	89	37	2	7	5	-
금회기성	169	45	61	40	6	-	13	1	3
누계물량	485	119	163	129	43	2	20	6	3

○ 노선별 불량맨홀 정비 현황

- 고덕로(59), 구천면로(4), 논현로(4), 도곡로(9), 동남로(3), 봉은사로(3), 송파대로(1), 압구정로(3), 양재대로(41), 언주로(2), 오금로(2), 올림픽로(36), 중대로(1), 테헤란로(1)

정산금액

계약액(예정)	기정산액	금회 정산액	누계기성액	잔액	비고
************	************	************	************	************	*****

품질시험 결과

○ 품질시험 기준

- 시방서 및 관련지침에 의거 시편 채취(300개소당 1회, 최소 연 2회 이상) 후 공인된 품질시험기관에 시험 의뢰

○ 품질시험 개요

- 품질시험 기간: 2019. 8. 27. ~ 9. 4.

- 시료채취 날짜: 2019. 8. 26.

- 시료채취 장소

· 가열아스팔트: 양재대로 1716(4차 작업지시 149번 하수도 맨홀)

· 시멘트콘크리트: 고덕로 62(4차 작업지시 14번 통신 맨홀)

○ 품질시험 결과(붙임 품질시험 결과보고 참조)

종별	시험항목	시험방법	관리기준	시험기관	시험결과	합격여부	비고
가열아스 팔트혼합물 (상온)	마샬 안정도 (양면 75회)	KS F 2337 (KS F 2369)	7,500N이상 (7,350N이상)	품질시험소	14,956N	합격
	공극률	KS F 2337 (KS F 2369)	3～6% (3～10%)	품질시험소	4%	합격
	인장강도비 (TSR)	아스팔트 콘크리트 포장 시공지침 (부속서 Ⅳ-6)	0.8이상	한국건설 생활환경 시험연구원	0.94	합격
	밀도 (다짐도)	KS F 2446	96%～100% (기준밀도대비)	품질시험소	시험중
시멘트 콘크리트 (모르타르)	압축강도	KS F 2405 (KS L ISO 679)	10MPa (1시간)	건설품질 기술연구원	21.4MPa	합격
평탄성	3m 직선자 활용, 3mm이내			자체측정	2.1mm, 2.4mm	합격

4		조치 계획

붙임 설계변경도서 및 정산서에 의거 설계변경 및 정산시행

붙임  1. 설계변경(제2회) 도서 1부.

2. 정산(제2회) 설계도서 1부.

3. 설계변경(제2회) 사유서 1부.

4. 품질시험 결과 보고(제2회 1부.

5. 노선별, 종류별 수량집계표 1부.  끝.