문서번호	토목부-17247
결재일자	2019.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
조재근	김동현	09/24 김용제

- 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 지하안전영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2019. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 지하안전영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

『잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 지하안전영향평가』용역사가 제출한 준공기한 연장 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ ㈜지오그린21 제-2019-238(2019. 09. 23. 과업기간 연장 요청)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 지하안전영향평가용역

❍ 규    모

- 잠실대교 남단IC : 연결로 연장 3.66km, 지하차도 300m, 교량 33m

- 천호대교 남단IC : 연결로 연장 2.95km, 지하차도 194m

❍ 용역기간 : '19. 3. 5. ~ '19. 9. 30.

❍ 도 급 비 : 28,818천원

❍ 용 역 사 : ㈜지오그린21

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : 2개월

- 용역기간 : 당초  '19.3.5.~'19.9.30. ⇒  변경 '19.3.5.~'19.11.30.

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 귀책부서 : 서울특별시

❍ 연기사유 : 건설기술심의소위원회(‘19.9.10) 결과 반영 등 실시설계성과품 보완에 따라 지하안전영향평가용역의 과업기간을 연장하여 설계품질 향상 및 과업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 조치의견 : 준공기한을 '19. 11. 30.까지 연기하여 용역을 관리하고자 함.

붙임 : 계약기간 연장 요청 공문 및 합의 각서 각 1부. 끝.