문서번호	방재시설부-14231
결재일자	2019.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
권지현		오춘섭	09/24 이임섭
협조	주무관		김상용
	주무관		김현곤

『 낙산성곽길 정비공사 』

주계약자 공동도급 공종분리 검증위원회 개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 09

도시기반시설본부

(방재시설부)

『 낙산성곽길 정비공사 』

주계약자 공동도급 공종분리 검증위원회 개최계획

『낙산성곽길 정비공사』발주 전 공동수급체 구성을 위한 공종 내역 분리의 적정성 검토와 주계약자 계획·관리·조정업무등 분담률 산정을 위한 공종분리 검증위원회를 구성, 회의를 개최하고자 함.

1				사업개요

○ 위    치 : 종로구 종로6가 69번지 일대

○ 사업내용 : 동대문 성곽공원 ~ 낙산정상까지 한양도성 내측 순성길 주변 정비

- 규  모 : 연장 863m, 면적 15,220㎡, 폭 15m내외

- 내  용 : 성곽길 정비, 차도 및 놀이시설 정비

○ 기    간 : 2019. 10 ~ 2020. 12

○ 사 업 비 : 3,937백만원 (설계비: 510,시설비: 3,427)

위치도	조감도

2				추진경위

○′15. 07.             : 성곽마을 재생사업 추진사항 시장보고

○′17. 12.11         : 한양도성 순성길 주변 정비사업 실행계획

○′18. 02.23         : 문화재 현상변경 허가

○′18. 04.29         : 전망대 조성 및 성곽길 실시설계 용역 계약

○′18. 11.05         : 문화재 현상변경 허가사항 변경 허가

○′19. 06.28         : 전망대 조성 및 성곽길 실시설계 용역 완료

○′19. 08.29         : 계약심사 완료

○′19. 09.09         : 공사시행(발주) 계획 보고 (주거환경개선과-11732)

※ 연내 공사가 가능한 성곽마을 구역 우선 시행하고, 전망대 조성(2개소)은 추후 시행

3				회의개요 및 검토내용

□ 회의개요

○ 일  시 : 2019. 09. 27. 10:00

○ 장  소 : 방재시설부 회의실

○ 위원회 구성

- 위원장 : 도기본 공원시설과장

- 내부위원(3명) : 공원시설과 권지현, 김현곤, 방재시설과 김상용

- 외부위원(4명)

연번	구 분	소 속	성 명	비 고
1	외부위원	㈜유신	윤진호	용역 책임기술자
2	외부위원	㈜유신	최효욱	분야별(조경) 기술자
3	외부위원	㈜갑을건설	이 홍	토목 분야 (남산예장자락 조성 시공사)
4	외부위원	안산조경건설㈜	박기호	조경 분야 (남산예장자락 조성 시공사)

□ 주요 검토내용

○ 공동수급체 구성원 간 하자구분이 분명하도록 공종내역 구분 여부

○ 주계약자 공동수급체 구성원수 및 비율 적정 여부

○ 전문공종 분리 시 현장 시공여건 적정성 및 기타 사항

○ 주계약자 계획·관리·조정·대가 분담률 산정

□ 외부위원 수당지급

○ 지급금액 : 금200,000원(100,000원 × 2인)

○ 예산과목 : 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 효율적인 청사관리,

사무관리비

4				향후계획

□ 2019. 10. : 공종분리 검증위원회 적정성 검토 의뢰

(도기본 → 건설혁신과)

□ 2019. 10. : 일상감사 의뢰 (도기본 → 안전감사담당관)

□ 2019. 10. : 공사발주 및 계약의뢰 (도기본 → 재무과)

붙 임 : 주계약 공동도급 산정표 및 체크리스트 각 1부. 끝.