투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약(용역기간 연장) 의뢰

1. 총무과-10874호(2019.10.4.)호와 관련입니다.

2. 난지창작스튜디오 태양광 연계용 ESS(에너지저장장치) 설치공사 설계용역에 대하여 아래와

같이 변경계약을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경계약 내용

계약건명	당초		변경		비 고
	계약기간	금액(천원)	계약기간	금액(천원)
태양광 연계용 ESS 설치공사 설계용역	2019.9.9.~10.8 (30일)	15,550	2019.9.9.~10.31 (53일)	15,550	23일 연장

붙  임 : 1. 전문가 자문회의 결과 보고 및 설계변경 계획 1부

2. 합의각서 1부

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

★주무관	김종민		총무과장	10/04 황차호
협조자	주무관	代주옥금
시행	총무과-10878	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61 (서소문동)	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8878	/전송	02-2124-8830	/	seminarium@seoul.go.kr	/	부분공개(5)