문서번호	설비부-15684
결재일자	2019.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		代곽용길	10/11 임정규
협조

노들섬 특화공간 조성 통신공사

설계변경(총차, 3차 정산) 실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 통신공사

설계변경(총차, 3차 정산) 실정보고 검토 보고

『노들섬 특화공간 조성 통신공사』중 건설사업관리단으로 부터 제출된 주관부서 요청사항(CCTV 추가) 및 현장여건을 반영한 설계변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.9. ~ `19.10.20.(3차, ’19.1.28~10.20)

□ 도 급 비 : *************************

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ ’19.09.27. : 실정보고승인(군시설 CCTV 추가 설치 등)[도시기반시설본부-19-11172]

○ ’19.10.10. : 노들섬 특화공간 조성 통신공사(총차, 3차 정산) 설계변경 검토보고[유탑-현장-19-1168호]

□ 계약변경 현황

○ 변경 사유

- 수방사 도로감시용 카메라 및 UPS 추가에 따른 물량 증가

- 운영자 요구자 사항(공연장 및 다목적실 배관배선 추가) 반영 및 현장여건에 따른 물량 증감

- 제경비정산(4보험료 및 ESC등)

○ 주요 변경 사항

(단위:천원)

공종	주요변경내용	금 액	비고
통합배선 공사	광케이블 내외관 일체형 전선관 감소 음성유도기 삭제	******
방송설비공사	다목적실 방송 회로분리 배관배선 추가	*****
AV설비 공사	공연장 및 다목적실 AV 케이블 증 음향감독실 CCTV표출 배관배선 증	******
CCTV설비 공사	맨홀 2개소 추가 옥외 폴 3개 감	*****
주차관제설비	주차관제 패드추가 마차등, 출하등 배관배선 물량 증감	*****
수방사 군부대 공사	맨홀1개 감, 통합배선 옥외지중배관 물량 감소	******
수방사 군부대 공사	도로감시용 카메라 추가에 따른 배관배선 증가 UPS 5kVA 1대 추가 등	******
소 계		******
제 경 비	VAT포함 제경비 정산(4대보험료)	******
합 계		******

○ 공사금액 변경 현황

(금액 : 원)

구 분	당초	변경	증감	비 고
총 차	*************	*************	**********
1 차	**********	**********	*	준공
2 차	***********	***********	*	준공
3차	***********	***********	**********

○ 계약기간 변경 : 변경없음

구 분	계약기간	비 고
총차	`17.11.09. ~ `19.10.20.	변경없음
3차	`19.01.28. ~ `19.10.20.	변경없음
2차	`18.06.05. ~ `18.12.31.	준 공
1차	`17.11.09. ~ `18.05.31.	준 공

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 운영자 요구사항 공연장 및 다목적실 배관 배선 추가 적정하게 산출 되었으며, 수방사 도로 감시용 카메라 및 UPS 추가에 따른 배관배선 물량이 적정하게 산출 되었음.

○ 총차공사 실정보고 내용은 현장여건, 운영자 요구사항에 부합하고 타당하다고 사료됨.

○ 단가검토 : 추가계약(설계변경) 단가적용기준은 낙찰율(86.7484%) 적용

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단 설계변경(총차 및 3차 정산) 요청사항 검토 결과 설계변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며

○ 총무부에 설계변경(정산-총차, 3차) 계약의뢰하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.