문서번호	설비부-15889
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		代곽용길	10/15 임정규
협조
	공공재생정책팀장		신명승

노들섬 특화공간 조성 전기공사

공사기간 연장(총차, 3차)검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 전기공사

공사기간 연장(총차, 3차) 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로 부터 제출된 공사기간연장(총차, 3차) 사항을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 전기공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.10.20.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜코에버정보기술 외 2

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.10.14. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사준공일 연기 신청 검토 보고(유탑노들 제19-517)

□ 공사 계약현황

(금액단위 : 원)

구 분	계약금액	계약기간	비 고
총차	*************	`17.11.16. ~ `19.05.15.
3차	*************	`19.01.28. ~ `19.05.15.
2차	***********	`18.06.05. ~ `18.12.31.	준 공
1차	**********	`17.11.16. ~ `18.05.31.	준 공

□ 공사 기간 연장

○ 연기사유 : 주관부서 요구사항(노들섬 하부 산책로 조명시설 추가)반영을 위한 준공기한이 연기(’19.11.30)필요

○ 공사기간 연장 현황

구 분	공사기간		비 고
	당 초	변 경
총차	`17.11.16. ~ `19.10.20.	`17.11.16. ~ `19.11.30.
3차	`19.01.28. ~ `19.10.20.	`19.01.28. ~ `19.11.30.

□ 건설사업관리단 검토의견

○ “노들섬 특화공간 조성 전기공사”의 총차 및 장기 3차 준공일연기 신청요청에 대한 적정성 검토결과, 위 검토 내용과 같이 총차 및 장기3차 계약변경을 시행하는 것이 타당하다고 사료되오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 추가 시공에 따른 공사기간 연장 요청사항에 의한 변경으로 계약금액 변동이 없으며 총차 및 3차기간이 변경됨을 적합하게 반영된 것으로  판단됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단 공기연장 요청사항 검토 결과 건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어 공사기간 연기(총차, 3차) 요청을 승인하고자 하며,

○ 총무부에 공사기간 연기(총차, 3차) 계약의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.