투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	공사기간 변경 계약의뢰(시립노원시각장애인 복지관 재건축공사)

우리본부에서 시행중인 『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사』의 1차공사의 공사기간 변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

가. 계약건명 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사(1차)

나. 공 사 비 : 2,982,036천원(1차:2,463,587천원, 2차:518,449천원)

다. 계 약 자 : 천마산건설(주)외 1

라. 공사기간 : 총차 : 2013. 01. 02 ~ 2014. 08. 31

(1차 : 2013. 01. 02 ~ 2014. 06. 30)

(2차 : 2014. 05. 17 ~ 2014. 08. 31)

마. 변경내용(공사기간)

구 분	공사금액(천원)	변경전 공사기간	변경후 공사기간	비고 (공사기간)
총 차	*********	*********************	*********************	변경없음
1차공사	*********	*********************	*********************	증)31일
2차공사	*******	*********************	*********************	변경없음

바. 변경사유 : 주관부서(운영자)의 추가공사 요청 및 현장 도로 포장구간 변경에 따른 공사량 증가로 공사기간 연장이 필요함.

따로붙임 : 1) 공사기간 변경검토 보고서 1부

2) 준공기한 연기의뢰서 및 각서 제출 각1부

3) 예정공정표(변경전,후) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정재흥		복지시설과장	조영수		건축부장	06/26 이병석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-7754	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2653	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	부분공개