2020년 생활문화센터 조성(복합시설) 사업계획서 <예시 : 적색>

광역 지자체	경기도	부서	문화종무과
담당자	ㅇ ㅇ ㅇ	직위(직급)	6급
전화번호	031-000-0000	이메일	000@korea.kr
사업수행	수원시	부서	문화예술과
담당자	ㅇ ㅇ ㅇ	직위(직급)	7급
전화번호	031-000-0000	이메일	000@korea.kr

1. 총  괄

복합시설명	수원 복합문화센터
사업위치	경기도 수원시 팔달구 효원로 241 ⇐ 사업위치 변경 불가
사업기간	2020년 ~ 2022년
총사업비	100억원 (국비 30억원, 지방비 70억원) ⇐ 국비 지원액 변경 불가
사업규모	부지 10,000㎡ / 건축연면적 4,000㎡
조성시설	구분	시설명	사업비 (억원)	건축연면적 (㎡)	층	비고
	생활soc 복합화 시설 (10종)*	생활문화센터	20	600	지상 5
		공공도서관	50	3,000	지상 2~4
		주거지주차장	20	-	지상	1,000㎡
	기타 시설 (모두 기재)	행정지원센터	10	400	지상 1
	합계	-	100	4,000
생활문화센터 사업비 (억원)	구분	계	‘20년	‘21년	‘22년	비고
	총사업비	20	6	7	7
	국비	9	3	3	3
	지방비	11	3	4	4

* 생활soc 복합화 시설(10종) : 생활문화센터, 공공도서관, 작은도서관, 국민체육센터, 다함께돌봄센터, 주거지주차장, 가족센터, 국공립어린이집, 공동육아나눔터, 주민건강센터 중 조성시설 모두 기재

◈ 사업대상지 위치도 및 사진

위 치 도
사 진 (주변 상황을 알 수 있도록 사진 촬영)

2. 생활문화센터 조성 및 운영계획

□ 공간 구성 계획

생활문화센터명		팔달 생활문화센터 ⇐ 생활문화센터 명칭 기재
구분		공간명	층	면적 (㎡)	용도	주요 설치 기자재
기본 시설	필수	마주침공간	5	100	주민 공동체 공간
		주민자율공간 (방음공간)	5	60	음악 연습	음향시설
		주민자율공간 (마루공간)	5	80	무용 연습
		주민자율공간 (학습공간)	5	60		프로젝터
	선택	동아리연습실	5	100
		다목적홀	5	100		음향 및 조명시설
특화시설		공유부엌	5	50		주방, 조리시설
		목공방	5	50
합계				600

□ 운영 계획

운영방식	□ 지자체 직영 □ 민간위탁 □ 주민자율
위탁단체	OO문화협동조합 (※위탁 시 위탁 예정단체명 기입)
위탁사유	지역에서 수년간 문화기획 활동을 하고 있는 단체로, 생활문화센터의 운영방향에 부합한 운영을 해갈 것으로 기대
운영시간	평일 10:00~22:00 / 주말 10:00~17:00 (휴관일: 매주 월요일)
인력계획	문화기획자 0명, 시설관리자 0명
운영방향	⦁ 지역주민이 주체가 되는 문화사랑방 - 다양한 생활문화 콘텐츠 체험, 생산의 공간 ⦁ 주민들의 관계형성을 위한 커뮤니티 공간 - 지역주민의 자율적인 문화활동 및 동호회 형성 지원

<세부 운영 프로그램>

구 분	프로그램 내용
생활문화센터 운영관리 프로그램	⦁ 주민 대상 교육 워크숍 - 생활문화센터 주민운영협의체 구성을 위한 교육 및 워크숍 - 생활문화센터 운영방향 설정 및 운영협의체 구성 ⦁ 주민운영협의체 정기회의 - 월례 운영회의를 통해 운영계획 및 규칙 수립 - 센터 운영에 필요한 여러 가지 사항 논의
주민참여 프로그램(대관)	⦁ 공간 대관 프로그램 - 개인 또는 주민 동호회 등 다양한 모임의 문화 활동 공간 제공 - 대관규정 및 공간이용규칙 등을 주민운영협의체 회의를 통해 수립
주민교류 프로그램	⦁ 세대 간, 동호회 간 교류를 위한 재능나눔 프로그램 - 주부들이 자취생에게 전해주는 집밥레시피 - 할머니가 가르쳐주는 손뜨개 - 청년들에게 배우는 스마트폰 - 밴드와 현악기 동호회의 만남 ⦁ 다문화 어울림 프로그램 - 고향의 음식, 문화 등을 소개하며 체험할 수 있는 프로그램 - 타문화에 대한 이해 및 소통을 위한 프로그램 ⦁ 주민생활문화축제 - 생활문화센터를 이용하는 개인 및 동호회, 소모임의 교류의 장 - 발표회, 전시회, 체험부스 등을 통해 센터를 이용하지 않는 주민에게도 생활문화 체험의 기회 제공 ※ 다양한 방식의 교류 프로그램을 통해 새로운 동호회 형성 기대
기타 프로그램 (마중물 프로그램)	⦁ 강좌형 프로그램 - 문화 활동에 대한 경험이 없는 지역이거나 생활문화센터의 활성화를 위한 마중물 사업으로 최소한의 규모로만 운영 - 강좌를 통해 형성된 동호회 또는 소모임이 자발적인 활동의 토대로 운영 ⦁ 지역의 역사 및 문화콘텐츠를 활용한 프로그램 - 지역의 설화를 활용한 인형극(예_ 상주생활문화센터 남장마을이야기) - 지역의 실태 및 특화된 콘텐츠를 활용한 프로그램 (탄광촌 사람들의 이야기를 담은 에세이집 제작 등)

□ 주요공간 운영 계획

구 분	운영 계획
마주침공간 (100㎡)	⦁ 생활문화센터 방문자 및 이용자들의 네트워크 기능의 공간으로 운영 ⦁ 자유롭게 이야기를 나눌 수 있도록 편안한 분위기로 조성
방음공간 (60㎡)	⦁ 합창, 밴드 등 각종 음악을 연습할 수 있는 공간으로 운영 ⦁ 정기 대관신청을 통해 배정(대관료 유/무)
마루공간 (80㎡)	⦁ 무용, 연극 등의 활동을 연습할 수 있는 공간으로 운영 ⦁ 정기 대관신청을 통해 배정(대관료 유/무)
학습공간 (60㎡)	⦁ 공예 및 미술활동, 학습모임, 회의 등 정적인 활동을 할 수 있는 공간으로 운영 ⦁ 정기 대관신청을 통해 배정(대관료 유/무)
다목적홀 (100㎡)	⦁ 발표회, 전시회 등을 할 수 있는 공간으로 운영 ⦁ 공간크기 및 분위기를 다양하게 연출할 수 있도록 가변적으로 운영
특화공간	⦁ 공유부엌, 목공실 등

□ 주민의견 반영계획

ㅇ 주민의견 수렴방식 : 설문조사, 주민설명회 및 교류, 좌담회 등

ㅇ 추진시기 및 방법

- 설계 전 : 주민워크숍(설명회)을 통한 생활문화센터의 운영방향 공유

- 설계 중 : 설문조사 및 좌담회를 통해 생활문화센터 공간 수요파악(설계사와 함께 참여)

- 착공~준공 전 : 주민운영협의체 구성 및 생활문화센터 운영계획 및 규칙 수립

3. 생활문화센터 조성 및 운영 연도별 투자계획

□ 생활문화센터 조성 연도별 사업비

구분	합계	2020년	2021년	2022년
사업비(억원)	20	6	7	7
사업내용		설계비	공사비	공사비

□ 지자체 인건비 및 운영비 투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년
합 계
인건비	소요예산
	산출규모
프로그램운영비	합계
	공예
	영상 컨텐츠
	한글교실
	문화학교
경상 운영비	합계
	비품
	임차비
	주민 간담회
시설 관리비	합계
	공공요금
	경비보안
	시설비품
기타 비용	합계
	홍보비
	벤치마킹
	일반운영비

4. 사업 추진일정

ㅇ ‘20. 1~2월  : 기본계획 수립

ㅇ ‘20. 3~4월  : 건축 설계공모

ㅇ ‘20. 5~10월 : 설계용역 추진

ㅇ ‘20. 11~12월 : 건축 인허가

ㅇ ‘21. 1월~‘22. 6월 : 공사 착공 및 준공

ㅇ ‘22. 7월~8월 : 개관 준비 및 개관