문서번호	설비부-16693
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	10/28 임정규
협조

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』

관급자재(태양광 조명등) 계약금액변경 및 납품기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』

관급자재(태양광 보행등) 계약금액변경 및 납품기한 연기보고

『노들섬 특화공간조성 전기공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(태양광 보행등) 계약금액 변경 및 납기연기에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 전기공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.11.30.

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ************

□ 건설사업관리단 : ******************

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.10.24. : 노들섬 하단부 조명자재 구매  및 설치 요창[공공재생과
-11538호)

○ `19.10.25. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사 관급자재(태양광 보행등 구매) 납기 및 계약금액 변경 요청[유탑노들 제19-570호)

□ 관급자재 계약 현황

품 명	납품요구번호	계약자	계약금액(원)	납품기한	비고
태양광보행등	************	******	***********	2019.10.31

□ 납품기한 연기 현황

○ 사 유 : 전기공사 연기에 따른 공정 미도래로 관급자재 납품시기 연기 필요.

○ 연기 현황

품 명	계약번호	계약자	납품기한		비고
			당초	변경
태양광보행등	************	******	2019.10.31	2019.11.30

○ 귀책사유 : 서울시 도시기반시설본부

○ 지체상금부과여부 : 미부과

□ 계약금액 변경 현황

○ 사 유 : 운영부서 요청에 의한 수량 조정(감)

○ 변경 현황

품 명	규격	수량(EA)	금액	비고
태양광보행등	MJS-L70B 70W	28	***********	당초
		14	***********	변경
합 계			***********	당초
			***********	변경

※ 조달수수료 별도

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 노들섬 하단부 설계변경 요청으로 금액 변경 및 납품기한 연기에 의거 관급자재 변경이 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단의 관급자재 납품기한 연기 및 물품 수량 변경 요청사항 검토 결과 요청내용이 적정한 것으로 판단되어 납품기한 연기 및 물품 구매 변경계약 하고자 하며, 총무부에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 각 1부.  끝.