“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	계약변경(용역 과업기간 연장) 요청

1. 우리부서에서 시행중인 서남물재생센터 슬러지 건조시설(2단계) 설치 기본 및 실시설계  용역과 관련, 아래와 같이 과업기간을 연장요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 서남물재생센터 슬러지 건조시설(2단계) 설치 기본 및 실시설계 용역

- 과업내용 : 슬러지처리시설 기초자료 수집, 검토, 건조공법 선정, 기본 및 실시설계 등

- 용역업체 : ㈜한국종합기술 외 1개업체

- 계약금액 : 697,550천원

나. 과업기간

- 당초 : 2018.10.22. ~ 2019.10.31.

- 변경 : 2018.10.22. ~ 2020.02.28.(연장기간 120일)

붙임 : 1. 관련 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	물재생시설과장
수신자	재무과장,물순환정책과장
주무관	김종희		물재생기전팀장	代안봉용		물재생시설과장	10/29 임춘근
협조자
시행	물재생시설과-14411	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서소문별관	/
전화	02-2133-3840	/전송	02-2133-1043,768-8931	/	kjhak90@seoul.go.kr	/	부분공개(5)