준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 공  사  명 : 2019년 양화교 보수공사

나. 계 약 업 체 : 씨엘엠건설(주)

다. 계 약  금 액 : 금430,455,000원

라. 계약년월일 : 2019. 04. 10.

마. 착수년월일 : 2019. 04. 10.

바. 준공예정일 : 2019. 11. 29.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다

가. 연기기한 : 2019. 12. 25.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 현장실사에 따른 실사자료 분석, 적정원가 산출, 외부전문가 자문회의 등 행정절차 소요에 따른 절대공기 부족

2019. 11.   .

교량안전과장      김 종 호  (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하