준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 구룡교외 2개소 보수공사

나. 계약업체 : ㈜동아기업

다. 계약금액 : 금925,725,600원(금구억이천오백칠십이만오천육백원)

라. 계약년월일 : 2019.  4.  8.

마. 착공년월일 : 2019.  4. 15.

바. 준공기한 : 2019. 11. 11.

2. 위 공사의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2019. 12. 25.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 현장실사에 따른 실사자료 분석, 적정원가 산출, 외부전문가 자문회의 등 행정절차 소요에 따른 절대공기 부족

첨부 : 합의각서 1부.

2019년  11월 1일

교량안전과장      김종호 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하