문서번호	설비부-17428
결재일자	2019.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		김오열	11/07 임정규
협 조

- 서울 공예박물관 조성 전기공사 -

관급자재(분전반) 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

도시기반시설본부

설비부

- 서울 공예박물관 조성 전기 및 통신공사 -

관급자재(분전반) 설계변경 검토 보고

본 전기공사 진행중 서울공예박물관 전시공간에 공조설비 등 추가 기계설비 설치에 따른 전원공급용 분전반 증설이 필요하게 되어 다음과 같이 변경하고자 보고 드림. ********************************************************************************
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울 공예박물관 조성 전기공사

□ 공사위치 : 종로구 율곡로 3길 4(구 풍문여고 부지)

□ 공사기간 : 총차`18.05.30. ~ `20.09.30.

1 차`18.05.30. ~ `19.12.31.

□ 도 급 비 : 총차 금2,244,214,005원

1 차 금519,485,000원

□ 계 약 자 : 서봉기업(주) 대표 김영태

2		분전반 계약현황

**********************

***********************************

************************************************************************************

3		분전반 변경(증설) 검토 내용

□ 관련 근거

○ 설계변경 기본계획 통보(서울 공예박물관 건립공사) : 총무과-2275호(`19.3.22)

○ 서울공예박물관 건립 기본설계 도면 송부 : 총무과-6881호(`19.9.6)

○ 관급자재(분전반) 구매 설계변경에 따른 실정 검토 보고 : 무영공예CM 제2019-391호(`19.11.07)

□ 분전반 증설 필요 사유

○ 공예박물관 전시공간 공조설비 등 추가 기계설비 설치에 따른 전원공급용 분전반 증설 필요

**************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

4		조 치 계 획

□ 공예박물관 전시공간에 공조설비 등 추가 기계설비 설치에 따른 전원공급용 분전반 증설(5면)를 위하여 아래와 같이 조달구매(3자단가)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

*******************

***************************************************************************************************************************

3		향 후 계 획

□ 2019.11. : 관급자재 추가 구매(조달구매)

□ 2019.12. : 관급자재 납품 및 검사

따로붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부. 끝.