				★ ◎
문서번호	에너지사업부-2924			부 원			에너지사업부장			에너지기술사업처장
보존기간	20년										10/18
				김수경			박철규			허원
결재일자	2019.10.18
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
거여6단지 태풍 피해로 인한 옥상 태양광 설치 철회 요청에 따른
임대아파트 옥상 태양광 설비 계약변경(안)
		서울주택도시공사
(에너지기술사업처 에너지사업부)

- 거여6단지 태풍 피해로 인한 태양광 설치 철회 요청에 따른  -

임대아파트 옥상 태양광발전설비 계약변경 (안)

Ⅰ		변 경 배 경

新 기후체제에 따라 주요 선진국과 더불어 정부의 에너지전환 정책의 일환인 신재생에너지 주택지원사업에 따라 추진 중인 “마장 에스에이치빌 아파트 외 3개단지 태양광발전장치 구매 설치”건과 관련하여 아래와 같은 변경사항이 발생하여 보고하고, 계약금액을 변경하고자 함.

Ⅱ		관 련 근 거

① 2019년도 임대 아파트 옥상 태양광 태양광발전설비 설치계획(안) (2차)

- 마장 에스에이치빌 아파트 외 3개단지 태양광 발전장치 구매 설치 건 (2019.09.30. 계약)

② 거여6단지 공용부 태양광 발전설비 설치 철회 요청

- 공문접수 : 송파센터-6790(2019.10.15.)

- 철회사유 : 태풍으로 인한 지붕 아스팔트 싱글 파손으로 인한 누수 발생

③ 단지별 설치 가능 용량 현황 회신 (SR-2019-1017-001 , 2019.10.17.)

- 에너지사업부 지시부 (2019-2호)에 따른 회신 (단지별 설치 가능 용량)

Ⅲ		계 약 현 황

① 계약현황 개요 (단위:원)

계약명	계약업체	계약금액	계약일~준공예정일	비고
마장 에스에이치빌 아파트 외 3개단지 태양광 발전장치 구매 설치	쏠라리버 주식회사	417,538,590	2019.09.30~ 2019.12.30	조달수수료 포함

② 단지별 용량 구성 현황

구 분	계	마장 에스에이치빌	거여6단지	세곡리엔파크4단지	천왕이펜하우스 8단지
용량 계(kW)	200	60	30	50	60
10kW	5	-	1	2	2
15kW	2	-	-	2	-
20kW	6	3	1	-	2
모니터링(대)	4	1	1	1	1

* 모니터링 시스템은 각 단지별 1EA 임

Ⅳ		변경사유 및 현황

① 변경사유

- 거여6단지 아파트 관리주체로부터 태풍 피해로 인한 옥상 지붕 아스팔트 싱글 파손으로  누수현상이 발생 되어 태양광 발전 설비 설치 철회 요청

(송파센터-6790, 2019.10.15.)

② 귀책소재 및 지체상금 부과 여부 : 우리공사, 지체상금 미 부과

③ 단지별 설치용량 및 금액 변경 현황

- 단지별 설치용량 변경 현황 ( 감소  , 증가  )

구 분	계		마장 에스에이치빌		거여6단지		세곡리엔파크4단지		천왕이펜하우스 8단지
	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후
용량계(kW)	200	200	60	60	40	0	50	60	60	80
10kW	5	5	-	-	1	0	2	3	2	2
15kW	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-
20kW	6	6	3	3	1	0	-	0	2	3
모니터링	4	3	1	1	1	0	1	1	1	1

* 전체 설치용량은 변경 없고, 1개단지 감소에 따라 모니터링 시스템 1개소 감소

- 태양광 발전장치 구성별 금액변경 현황                      (단위 : 원)

구 분		변경 전			변경 후
		구성	단가	금액	구성	단가	금액
총계	설치용량	200kW	-	-	200kW	-
	설치금액	-	-	417,538,590	-	-	414,964,590 (감 2,574,000)
소계	발전장치	-	-	356,101,542	-	-	356,101,542
	구조물	-	-	48,898,458	-	-	48,898,458
10kW	발전장치	5	18,225,000	91,125,000	5	18,225,000	91,125,000
	구조물	5	2,025,000	10,125,000	5	2,025,000	10,125,000
15kW	발전장치	2	26,137,971	52,275,942	2	26,137,971	52,275,942
	구조물	2	4,237,029	8,474,058	2	4,237,029	8,474,058
20kW	발전장치	6	35,450,100	212,700,600	6	35,450,100	212,700,600
	구조물	6	5,049,900	30,299,400	6	5,049,900	30,299,400
모니터링 시스템		4	2,574,000	10,296,000	3	2,574,000	7,722,000 (감 2,574,000)
조달수수료		1식		2,242,590	1식		2,242,590

* 단가 및 금액은 조달 계약 시 용량별 단가임

Ⅴ		계약 변경 요청

① 계약금액 변경 현황                                        (단위: 원)

계 약 명	계약업체	계약금액		준공 예정일
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
마장 에스에이치빌 아파트 외 3개단지 태양광 발전장치 구매 설치	쏠라리버 주식회사	417,538,590	414,964,590 (감 2,574,000)	2019.12.30	변경없음

* 조달수수료 포함 금액임.

Ⅵ		행 정 사 항

① 방침완료 후 계약부에 변경계약 의뢰

붙임  1. 거여6단지 태양광 설치 철회 요청 공문 1부

2. 지시부(2019-2호) 1부

3. 단지별 설치 가능 용량 공문 회신 1부

4. 분할납품요구및통지 1부.  끝.