문서번호	설비부-17506
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	11/08 임정규

『서울공예박물관 조성 기계공사』

관급자재(소화펌프) 구매 계획 보고

2019. 11.

서울도시기반시설본부

(설비부)

「서울공예박물관 조성 기계공사」

관급자재(소화펌프) 구매 계획 보고

우리 본부에서 시행중이 서울공예박물관 건립 기계공사의 관급자재(소화펌프)의 수급시기가 도래하여 아래와 같이 구매하고자 함

▷ 수량 및 금액 : 소화펌프 6대, 91,200천원

▷ 구 매  방 법 : 총액 수의계약(우수조달공동상표)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 조성 기계공사

□ 위    치 : 서울시 종로구 율곡로3길 4

□ 규    모 : 건물 6개동, 연면적 10,590㎡(부지면적 12,829㎡)

□ 공사기간 : 총차 2018.6.8.~2020.9.30.

□ 공사금액 : 총차 3,620,177,000원

□ 도 급 사 : 주식회사거륜에너텍 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜무영씨엠건축사사무소 외 2개사

Ⅱ		관련근거

□ 관급자재 소화펌프 구매 요청(서울공예박물관 조성공사)

- 무영공예CM 제2019-388(2019.11.05.)호

Ⅲ		구매계획

□ 구매 물품 내역

**	**	**	**	**
*****	***************	*	***********	***** ********
*******	************	*	**********
*****	***************	*	***********	******
*******	************	*	**********
*****		*	***********	*******

□ 계약방법 : 총액 수의계약

□ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제6호  라목

□ 수의계약 사유 : 안전에 관한 물품이므로 품질이 보증된 우수조달공동상표 지정제품으로 구매하고자 함

*****************************************

****************************

Ⅳ		향후계획

□ 2019.11. : 일상감사 의뢰

□ 2019.11. : 발주 의뢰

□ 2020.02. : 납품 완료

붙임 :  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.