문서번호	도시재생과-7933			주무관		주거재생팀장		도시재생과장		도시관리국장	부구청장
결재일자	2019.11.8.
				최경석		호은성		윤인식		한병준	전결 11/08 오해영
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
					기획예산과장		박규탁
					예산팀장		정세진
		- 빨래골 복개하천 복원 타당성 조사 용역- 사업비 불용조치 보고
2019.11.8.
강 북 구

- 빨래골 복개하천 복원 타당성 조사 용역-

사업비 불용조치 보고

서울시에서 추진 중인「복개하천 중심의 하천복원 종합계획 수립 용역」의 빨래골 복개하천 복원사업에 대한 검토 결과 하천 복원 시 대체도로 확보가 어렵고 저지대 침수 발생 등이 우려되므로 사업 추진이 어려울 것이라는 의견에 따라 타당성 조사 용역 사업비를 불용조치코자 함

Ⅰ		사업개요

사 업 명: 빨래골 복개하천 복원 타당성 조사 용역

위   치 : 수유동 486-815(산장빌라) ∼ 605-411(수유1파출소)

규   모 : 폭 5.2m(2m x 2m, 2련), 연장 410m

내   용 : 화계천(빨래골) 복개구조물 복원 타당성 조사

사 업 비 : 100백만원(특별교부금, ‘18년 명시이월)

위치도(삼양로77가길 일부)

Ⅱ		추진경위

2018.08.10.: ‘서울시장 강북구 한 달 살이’ 시 빨래골 복개구간 복원 검토 요청

2018.08.16.: 시장 요청사항 검토(안전치수과)

2018.08.28.: 특별교부금(100백만원) 배정 및 간주처리(안전치수과)

2018.09.21.: 수유1동 뉴딜사업 선정에 따른 본 용역 이행 협조 요청

(안전치수과 ☞ 도시재생과)

2018.10.30.: 용역비 명시이월 방침 수립

※ 서울시(하천관리과)에서 추진 중인 「복개하천 중심의 하천복원 종합계획 수립 용역」(‘18.6.18. ∼ ’19.12.20)에 화계천 복개구조물이 포함되어 있어 예산 중복투자 우려

	<복개하천 중심의 하천복원 종합계획 수립용역 >
□ 과업목적(대상) : 하천복원 가능성 및 타당성 분석(서울시 38개 하천복개구조물) □ 용 역 사 : 주식회사 한국종합기술 □ 용역기간 : `18.06.18~`19.12.20 □ 수행부서 : 서울시(하천관리과) □ 추진경위 - `18.06 : 용역 착수 - `19.12 : 용역 준공 - `20. 상반기 : 기본 및 실시설계(복원타당 복개구조물)

2019.04.08.: 빨래골(화계천) 복원 관련 현안사항 검토 보고(부구청장)

2019.04.11.: 화계천(빨래골) 구간 우선 검토 후 결과 회신 요청

(우리 구 ☞ 시 하천관리과)

2019.05.13.: 화계천(빨래골) 검토 결과 요청에 대한 회신

○ 현장조사 및 사례조사 진행 중으로 2019년 12월 종합계획 결과 도출 예정

2019.08.14.: 市 용역사 중간검토 회의(도시재생과)

2019.11.06.: 빨래골 복개구간 복원 검토 회신 (시 하천관리과 ☞ 우리 구)

Ⅲ		서울시 검토의견

해당 복원 구간은 주거밀집지역으로 대체도로 확보가 어렵고 도로의 폭이 5m 내외로 복원시 차량통행이 어려워 사유지 주차장 진출입 불가

또한, 경사가 급한 상류부 구간으로 복원후 홍수위 시 단면폐색(유수장애물에 따른 수위 상승)이 발생할 경우 범람 및 저지대 침수와 같은 치수안전상 문제가 우려

따라서, 하천현황 고려 시 검토요청 구간의 단기적 복원은 어려울 것으로 판단

Ⅳ		조치계획

상기 서울시 검토의견에 따라 단기적 복원은 어려울 것으로 판단되어 타당성 조사 용역비(명시이월: 100백만원)는 불용 조치하고 향후 별도 사업(용도)으로 변경하여 사용

붙임  1. 빨래골(화계천) 복원 관련 현안사항 검토 보고(2019.04.08.) 1부.

2. 검토회신(화계천 복개구간 복원) 1부.  끝.