문서번호	교통정보과-6836
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
이철주		조대근	11/19 代최광선
협조

2019년 버스정보안내단말기(BIT)설치사업-강서권역

설계변경(정산) 시행 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.11.

교통정보과

(버스정보팀)

2019년 버스정보안내단말기(BIT)설치사업-강서권역

설계변경(정산) 시행 검토보고

우리 부서에서 추진 중인 ‘2019년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업-강서권역’ 준공에 따른 설계변경(정산)내용을 검토하고 보고드림.

□ 사업개요

○ 사  업  명 : 2019년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업 - 강서권역

○ 사업  기간 : ‘19.04.11.~‘19.11.20.

○ 계약상대자 : ㈜데일리블록체인
○ 계약  금액 : 1,365,100,000원

□ 계약변경 사항

○ 계약(금액) 변경

변경 전	변경 후	비고
**************	**************	**************

□ 설계변경 주요 내용

○ 알뜰BIT 물품구매 금액 정산 ************

- 알뜰BIT 설치정류소의 표지판 유무에 따른 표지판 신규제작 26대 증가

구분	계획대수	납품대수	단가	비고
표지판이 있는 경우	150대	122대	************	*************
표지판이 없는 경우	47대	71대	************	*************
합계	197대	193대	*	**************

○ 독립형BIT 물품구매 금액 정산 ***************

- 독립형단말기 지주형4개소 설치 취소, 승차대형 7개소 추가 설치로 독립형BIT 18대 납품비용 증가

구분	계획대수	납품대수	단가	비고
독립형 BIT	15대	18대	************	**************
지지 Pole	15개	12대	************	***************
부착물방지시트	15개	11개	************	***************
합계	-	-	*	**************

○ 전기공사 금액 정산 ***************

- 독립형 지주형 4개소 감소 및 승차대 거치형 7개소(승차대 전원사용 등)설치 및 보도 관리청복구에 따른 전기공사 비용 감소

- 설치 후 민원에 의한 설치/철거비용 반영

- 알뜰BIT 전기공사구간 길이 및 자재사용내역에 변경에 의한 공사비 감소

구분	공사계획 (공사비용)	***********	**
독립형BIT	15개소 (95,006,000원)	*********************	*************
	설치후 철거 1개소 ( - 원)	*********************
알뜰 BIT	197개소 (172,012,000원)	*********************	**************
합계	212개소(267,018,000원)	********************	*************

○ 승차대 거치형 단말기 미설치/미운영**************

- 버스정책과(자치구)의 신규 승차대 설치 정류소의 경우 승차대 거치형의 버스정보안내단말기 설치 추진(교통정보과-5566, 2019.10.30.)

- 버스정보안내단말기 설치사업 준공일(2019.11.20.) 기준 승차대 설치 완료 여부에 따른 설치/전기수전/운영(테스트) 비용정산

구분	거치형 대수	미 설치	전기 미 수전	미 운영(테스트)	비고
대수	59대	**	**	**
단가	-	**********	********	*********
합계		*********	*********	*********	***********

○ 보험료 등 경비 정산 ***************

- 산재, 고용, 연금, 건강, 노인장기요양보험료 및 산업안전보건관리비 등 정산

구분	금액(당초)	금액(정산)	비고
직 접 경 비	67,397,437	**********	**************
산 재 보 험 료	8,328,988	**********	**************
고 용 보 험 료	1,932,325	**********	**************
건 강 보 험 료	7,079,391	**	**************
연 금 보 험 료	9,862,928	**	**************
기 타 경 비	25,145,485	**********	**************
산업안전보건관리비	7,238,492	***********	**************
퇴 직 공 제 부 금 비	5,041,052	**	**************
노인장기요양보험료	602,456	**	**************
합계	132,628,554	**********	*************

□ 계약(금액) 변경 요약

○ 주요 비목별 변경 금액

구 분		단위	수량	금액(원)	증감	비고
물품구매	당초	식	1	***********	*************	*********************
	변경	식	1	***********
2. 순공사비	당초	식	1	***********	*************	******************************** *****************
	변경	식	1	***********
3. 부가가치세	당초	식	1	***********	*************	**********
	변경	식	1	***********
4. 합계	당초	-	-	*************	*************	***********
	변경	-	-	*************

□ 향후계획

○ ’18.11.19. : 재무과 계약변경 의뢰

○ ’18.11.20. ~ 12.05. : 변경계약, 준공검사 등

붙임 :	1. 산출내역서(버스정보안내단말기 설치사업-강서권역)_설계변경 1부.

2. 버스정보안내단말기(BIT) 설치 정류소 리스트 1부.

3. 합의각서 및 보험료 등 완납증명원 등 1부.  끝.

4. 감리검토 보고서 1부.  끝.

□ 붙임1 : 독립형BIT 전기공사변경내 역 상세

비고	공종	단위	수량(당초)	수량(변경)
****	********	*	**	**
****	*******	*	*	*
****	**********	*	***	*
****	***********	*	*****	***
*****	**************	*	*	**
*****	***********	*	**	*****
*****	**************	*	*	**
*****	*****	*	**	*****
*****	***********	*	*	**
*****	***********	*	*	*
*****	***********	*	*	*
*****	***********	*	*	**
*****	*******	*	*	*
*****	****	*	*	*
*****	*******	*	**	***
*****	**********	*	*	**
*****	***********	*	*	*
*****	********	*	**	**
*****	*****	*	**	*
*****	********	*	*	*
*****	**********	*	**	**
*****	********	*	**	**
*****	**********	*	*	*
*****	*****	*	***	**
*****	*******	*	**	*
*****	**	*	*	**
*****	*****	*	**	*
*****	**********	*	***	**
*****	********	*	**	*
*****	******************	*	***	*
*****	*********************	*	*	*
*****	********	*	***	**
*****	*****	*	**	*
*****	******	*	***	**
*****	******	*	*	**
*****	*****	*	**	**
*****	****	*	**	**
*****	*******	*	*	*
*****	****************	*	*	**
*****	*******	*	*	**
*****	*******	*	**	**
*****	*******	*	*	**
*****	**********	*	***	***
*****	************	*	*	**
*****	************	*	*	*
*****	**********	*	*	**
*****	*********	*	**	**

□ 붙임2 : 알뜰BIT 전기공사변경내역 상세

비고	공종	단위	수량 (당초)	수량 (변경)
****	********	*	***	***
****	*******	*	***	*****
****	***********	*	*****	*****
*****	***********	*	*****	*****
*****	*****	*	*****	*****
*****	*******	*	***	**
*****	*********	*	***	***
*****	*******	*	***	***
*****	*******	*	***	***
*****	*******	*	***	*****
*****	*****	*	**	***
*****	*****	*	***	**
*****	*******	*	***	***
*****	*********	*	***	***
*****	**	*	***	***
*****	*****	*	**	**
*****	*****	*	**	**
*****	**********	*	***	***
*****	**********	*	**	**
*****	********	*	***	***
*****	*****	*	**	**
*****	*****	*	*	**
*****	*****	*	***	***
*****	*******	*	***	**