문서번호	기전과-11639
결재일자	2019.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
이동훈		代김흥식	11/26 박문희
협조

2019년 노인 보행사고 다발지역 개선사업 교통신호기 공사(영등포시장 교차로) 준공기한 연기 검토보고

2019. 11.

강서도로사업소

기전과

2019년 노인 보행사고 다발지역 교통신호기 공사

(영등포시장 교차로)  준공기한 연기 검토 보고

2019 노인 보행사고 다발지역 교통신호기공사(영등포시장 교차로) 중 감리업체가 제출한 준공기한 연기 건에 대해 검토하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 「2019년 노인 보행사고 다발지역 개선사업 교통신호기 공사(영등포시장 교차         로)-강서」 준공기한 연기원 제출 건 [동일(교통) 제19-3124호(2019.11.25.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 노인 보행사고 다발지역 개선사업 교통신호기 공사(영등포시장 교차로)

○ 계약금액 : ******************************

○ 계약일자 : 2019. 10. 28.

○ 착공일자 : 2019. 11. 07.

○ 준공기한 : 2019. 11. 30.

○ 공사내용 : 신호지주 신설 및 철거, 제어기 신설, 차량 및 보행신호등 이설,                  잔여시간표시기 신설, 기타 부대공사(케이블 및 배관공사 등)

○ 계약업체 : ㈜부성시스템

○ 감리업체 : ㈜동일기술공사

□ 준공기한 연기내용

구분	변경 전	변경 후	비고
공사기간	2019.11.07. ~ 2019.11.30.	2019.11.07. ~ 2019.12.31.	영등포시장 교차로 토목공사 지연으로 공사기간 내에 준공이 불가하여 준공기한 연장

□ 조치의견

○ 준공기한 연기 건에 대한 내용 및 사유가 적정하여 이를 승인하고 시행하고자 함.

□ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰  끝.